문서번호	시설관리과-13597
결재일자	2019.6.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		시설관리과장		남부수도사업소장
김선호		김기상		06/27 조두업
협 조

준공기한  연기 보고(폐기물)

2018. 6.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

준공기한  연기 보고 (폐기물)

’19년 누수복구공사와 관련된 페기물업체는 적격심사 중으로 원할한 폐기물 처리를 위하여 기존 폐기물업체가 신규업체 결정시까지 처리토록 준공기한을 연기 하고자 함.

□ 용역현황

○ 용 역 명 : 2018년 남부 관내 긴급누수복구공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역규모 : 수집,운반 (1,970㎥), 건설폐기물 처리 (4,170톤)

○ 계약기간 : 2018. 06. 20 ~ 2019. 06. 30

○ 계약금액 : *********************************

○ 계 약 자 : ***************************

□ 연기요청 기간

○ 당 초 : 2018. 06. 20 ~ 2019. 06. 30

○ 변 경 : 2018. 06. 20 ~ 2019. 07. 20 (20일 연기)

□ 보고내용

○ 신규로 착공(6.28일)하는 누수복구업체 폐기물 반출과 관련「 ’19년 남부 관내 긴급누수복구공사 건설폐기물처리용역」업체가 현재 적격 심사 중으로 폐기물 반출에 어려움이 있는 실정임.

○ 폐기물처리업체 적격심사가 끝나면 즉시 계약될 수도 있으나, 부적격 업체일 경우 일정기간이 추가로 소요될 수도 있음.

○ 따라서 원할한 폐기물처리를 위하여 현재 계약되어 있는 업체의 용역처리 기간을 연장 코자 함.

□ 조치(검토) 의견

○ 신규업체 계약 일정(예정)

‣ 적격심사 (7월 3일) → 착공일 (7월 8일)

○ 페기물처리 종료 이후에도 설계변경 및 준공 등 일정 소요기간 필요

○ 준공기한 연기

구 분	준공기한 변경	지체상금부과여부	귀책사유
당 초	‘18.06.20~‘19.06.30	미 부 과	남부수도 사업소
변 경	‘18.06.20~‘19.07.20

붙임문서 : 준공기한 변경계약 합의서 1부.  끝.