문서번호	인력개발과-14524
결재일자	2019.6.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		인재노무팀장	인력개발과장
전성민		권소현	06/27 代권소현
협조

서천연수원 외부목재데크 개선공사

준공검사 결과보고

2019. 6.

서천연수원 외부목재데크 개선공사 준공검사 결과보고

서천연수원의 외부데크 개선공사에 대해 서천연수원 현장감독자와 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		관 련 문 서

□ 서천연수원 외부목재데크 개선공사 준공서류 제출(부흥 190617, ’19.06.17.)

□ 검사원 지정 요구서(재무과-31740호,’19.06.17.)

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 서천연수원 외부목재데크 개선공사

□ 공사규모 : 외부데크 968㎡ 철거 후 신설

□ 계약금액 : 124,050,000원

□ 공사기간 : 2019.05.07. ~ 06.15.

□ 시 공 사 : ㈜부흥조경

Ⅲ		추 진 경 위

□ 2019.03.26. : 공사발주 계획

□ 2019.05.07. : 공사계약 및 착공

□ 2019.06.17. : 준공계 제출

Ⅳ		준공검사 내용

□ 대    상 : 서천연수원 외부목재데크 개선공사

□ 일    시 : 2019.06.20.(목)

□ 준공검사 신청내용

[단위: 천원]

구 분	계약금액	준공금액			비 고
		전회기성액	준공기성액	합 계
금 액	124,050	-	124,050	124,050
비율(%)	100%	-	100 %	100 %

□ 준공검사 결과

○ 현장검사 결과

- 시공사 입회하에 서천연수원 현장감독자와 현장확인 및 서류를 검토한 결과 설계도서 및 계약내용대로 완료함

○ 준공정산 검토결과 : 감160천원

- 국민건강․연금․노인장기요양보험료, 환경보전비, 건설기계대여 지급보증비, 산업안전보건비 증빙서류 제출내용으로 정산 : 감6,758천원

- 목재데크 표면(968㎡)만 오일스테인칠(2회)을 하도록 되어 있으나, 목재데크의 내구성 향상을 위해 뒷면도 오일스테인칠(1회)을 하여 해당 시공물량(968㎡) 반영 : 증5,872천원

- 폐기물처리 실물량 반영(설계 21톤 ⇒ 실제처리 30.28톤) : 증726천원

○ 준공정산 금액

[단위: 천원]

구 분	변경전	변경후	증감액	비고
공급가액	112,772,728	112,627,273	145,455
부가가치세	11,277,272	11,277,27	145,45
도 급 액	124,050,000	123,890,000	160,000

Ⅴ		행 정 사 항

□ 재무과에 준공정산 및 준공검사조서 통보

붙임  1) 준공검사원 지정 요구서 1부.
2) 준공계 제출 공문(시공사) 1부.
3) 서천연수원 현장감독자 준공검사조서 1부.
4) 준공정산 내역서 및 합의각서 1부.
5) 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.
6) 제경비 정산 증빙서류 1부.
7) 준공사진 1부.
8) 노무비 지급명세서 1부. 끝.