문서번호	전시기획과-1937
결재일자	2019.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전시기획과장	서울공예박물관장
이소현		채영	06/27 이은주
협조
	총무과장		김득삼

서울공예박물관

전시기본설계 용역 시행 계획

2019. 6

서울공예박물관

(전시기획과)

서울공예박물관 전시기본설계 용역 시행 계획

서울공예박물관 개관전시계획을 수립하고 이를 구현하기 위한 전시 기본설계용역을 실시하여 전시 제작 설치 및 개관준비에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거 및 개요

□ 추진근거

○ 서울공예문화박물관 건립계획안(행정1부시장방침 제297호, ’14.9.25.)

○ 서울공예박물관 건립 변경기본계획안(시장방침 제186호, ’16.7.3.)

○ 서울공예박물관 설계변경 계획(시장방침 제124호, ’18.7.12.)

○ 서울공예박물관 개관전시 기본설계 추진계획(전시과-1912, ’19.6.25.)

□ 추진개요

○ 사 업 명 : 서울공예박물관 전시기본설계 용역

○ 사업기간 : ’19. 7. ~ ’19. 10.

○ 사 업 비 : 123,212천원

○ 대상면적 : 4,465.46㎡(1,353평)

Ⅱ		추진계획

□ 용역개요

○ 과 업 명: 서울공예박물관 전시기본설계 용역

○ 과업대상: 4,465.46㎡ / 4개관 10개전시, 전시형수장고, 아카이브실

○ 과업기간: 계약일로부터 75일

○ 과업내용: 서울공예박물관 개관전시 기본설계, 도면 및 산출내역서 작성 등

○ 과업대상 유형 및 면적

층별	공예역사관			직물공예관	현대공예관	어린이공예박물관
	1734.2㎡			1317.08㎡	951.21㎡	462.97㎡
5층	․			사무공간	․	․
4층	․			전시형수장고 452.35㎡	․	교육실
3층	공예역사전시 465.86㎡		지역공예전시 237.5㎡	보자기전시/기증자기념전시 476.87㎡	현대공예전시 357.72㎡	어린이공예공방 219.97㎡
2층	공예역사전시445.41㎡		아카이브실 253.75㎡	자수전시 387.86㎡	현대공예전시 314.07㎡	어린이공예전시 243㎡
1층	도서실 로비	공예기술전시 331.68㎡		커뮤니티 공간	현대공예전시 279.42㎡	강당

※리모델링 공사에 따라 일부 면적 변경될 수 있음
※건립부지 역사전시 공간 추후 확정

○ 주요 과업내용
- 서울공예박물관 운영 미션 및 전시 기본 방향 구현
- 개관전시 방향 및 전략, 동선계획 수립
- 전시별 콘텐츠 선정 및 공간 구성
- 전시 시나리오 및 연출 방안 구상
- 전시계획에 따른 기본설계, 도면 및 산출내역서 작성

○ 소요예산 : 123,212천원(부가세 포함)

○ 계약방법 : 제한경쟁 입찰(협상에 의한 계약)

Ⅲ		행정사항

□ 소요예산

○ 예산내역

항목	산출내역				금액(원)
※설계비는 기본설계 25%, 실시설계 75% 로 산정	○ 전시면적 4,465.46㎡× 제작설치비단가 2,181,217원/㎡(부가가치세 제외) 서울공예박물관 건립변경기본계획(안) 기준 금액에 표준건축비 상승률 반영 ○ 제작설치비 9,740,137,265원 적용
	대가요율 산출	공사비 50억원	4.71%	설계비 요율 계산식 (직선보간법)
		공사비 100억원	4.59%	4.71 - (97-50)(4.71-4.59)/(100-50)
		공사비 97억원	4.60%
전시기본설계비	9,740,137,265 × 4.6% × 25% x 1.1 ※백만원 단위 이하 절사					123,212,000

○ 예산근거: 공공발주사업에 대한 건축사의 업무 범위와 대가기준

□ 향후 추진일정

○ 제안요청서 사전공개 ○ 제안요청서 입찰공고 ○ 제안서 평가 ○ 협상 및 계약 의뢰 ○ 용역 시행 ○ 기본설계 준공	: ’19. 6월 중 : ’19. 7월 초 : ’19. 7월 중 : ’19. 7월 말 : ’19. 7월 말~9월 말 : ’19. 10월 중

붙임1.  서울공예박물관 개관전시 기본설계 추진계획 1부

붙임2.  전시기본설계 용역 입찰공고문(안) 1부

붙임3.  전시기본설계 용역 제안요청서(안) 1부

붙임4.  전시기본설계 용역 과업내용서(안) 1부.  끝.