투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 요청 -양재대로 지하차도 기본 및 실시설계용역 -

1. 도로계획과-8708(2019.06.24.), 및 동일(구조)제19-16591(2019.06.26.)호와 관련입니다.

2. “양재대로 지하차도 기본 및 실시설계 용역”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 양재대로 지하차도 기본 및 실시설계

나. 계 약 자 : ㈜동일기술공사 외 4개사

다. 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	2013.07.08.~ 2019.06.30.	2013.07.08.~ 2019.08.31.	증 2개월
용역금액	1,920,538,000원	1,920,538,000원	변경없음

라. 귀책소재 : 서울특별시

마. 연기사유 : *********************************************하고자 함.

붙임 : 1) 준공기한 연기요청 공문(도로계획과) 1부.

2) 준공기한 연기의뢰서 1부.

3) 과업연기 업체공문 및 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	이정원		토목설계과장	김동현		토목부장	06/27 김영수
협조자
시행	토목부-11484	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2567	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(6)