문서번호	광화문광장추진단-2180
결재일자	2018.10.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
★주무관	광장재생팀장	광화문광장기획반장	광화문광장추진단장		도시재생본부장
최연섭	우인식	代이강수	김재용		10/04 代한병용
협 조

GTX-A노선 광화문 복합역사 신설을 위한

타당성조사 및 기본계획용역 시행계획

2018. 10.

도시재생본부

【광화문광장추진단】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

GTX-A 광화문 복합역사 신설을 위한

타당성 조사 및 기본계획용역 시행 계획

새로운 광화문광장 조성과 관련하여 대중교통 접근성 개선을 위해 수도권광역급행철도(GTX-A노선) 사업과 연계하여 광화문일대 중심성을 강화하고자 광화문 복합역사 신설을 위한 타당성 조사 및 기본계획 수립용역을 시행하고자함.

1		추진근거

□ 추진근거

❍ 새로운 광화문광장 조성 추진(‘18.6.1.)

❍ 서울특별시 녹색교통진흥지역 특별종합대책(국토교통부 고시 제2018-483호, ‘18.7.30.)

□ 추진경위

❍ ’17.12.29.:	GTX-A노선 민간투자대상사업 지정 및 시설사업기본계획 고시(국토교통부)
❍ ’18.04.10.:	새로운 광화문광장 조성 기본계획안 대외발표(서울특별시-문화재청 업무협약)
❍ ’18.04.27.:	GTX-A노선 우선협상대상자(신한은행 컨소시엄) 지정(국토교통부)
❍ ’18.06.01.:	새로운 광화문광장 조성 추진(기본방침 수립)
❍ ’18.07.26.:	GTX-A노선 중간역(광화문역) 추가 설치 건의(시→국토부)
❍ ’18.08.10.:	수도권광역급행철도 A노선 광화문역 추가설치 건의 관련 회신(국토부→시) 광화문역 추가에 대한 타당성 조사 및 타당성 증빙자료 제시

2		광화문 복합역사 추진계획

□ 복합역사 필요성

❍ 녹색교통 중심의 대중교통 인프라 확충을 통한 도심권 친환경 교통체계 재편 필요

❍ 대중교통 역사 신설을 통한 추가 환승수요 확보 및 국내·외 관광객 이동편의 증진

❍ 수도권 거주 출퇴근 시민들의 서울 도심 접근성 향상과 역사도심 중심성 강화

❍ 강남·북 격차 해소 및 지역균형 발전을 위한 광역교통 연계 필요

□ 광화문 복합역사 추진계획

❍ 광역철도 도심권 통과 구간 내 수도권광역급행철도 ‘광화문역’ 신설

- ‘GTX-A’, ‘신분당선’ 공용구간(서울역~연신내) 내 ‘광화문역’ 설치

- ************************************

∙************************

❍ 도심 내 주요 철도노선 연결 및 세종로 지하 복합공간 조성

- 도심내 주요 노선 직결 및 주변역사 지하 보행네트워크 연결(총 7개 노선 연결)

************************************************************************************

- 복합상업시설 등 지하공간 복합 활용(지하 3층 규모, 폭 70m, 길이 165m)

***************************************************

*

3		용역시행 계획

□ 용역개요

❍ 용 역 명: GTX-A노선 광화문 복합역사 신설 타당성조사 및 기본계획용역

❍ 용역기간: 착수일로부터 300일(10개월)

❍ 소요예산: ***********************

❍ 사업내용: GTX-A노선 광화문 복합역사 신설

□ 과업내용

❍ 과업의 기본방향

- GTX-A노선(수도권광역급행철도) 및 신분당선 서북부연장 광화문 복합역사 신설

- 세종대로 지하 복합공간 조성

- 철도와 철도간 철도와 버스간 통합환승시스템 도입으로 광역 대중교통체계의  광화문 허브센터 조성

❍ 과업의 범위

- 공간적 범위

∙GTX-A노선 광화문 복합역사 신설구간(시청역～광화문역간) 직·간접 영향권

- 내용적 범위

∙타당성조사 및 기본계획

(국가통합교통체계효율화법 제18조, 철도건설법 제7조, 도시철도법 제6조 포함)

∙사전재해영향성 검토, 사업시행 방안 검토 등

❍ 주요 과업내용

- 교통현황조사 및 관련계획 조사 분석

- 복합역사 건설 및 운영의 경제성, 재무성 분석과 그 밖의 타당성 평가

****************************************

- 장래 수송 수요예측 등을 토대로 설정 가능한 대안 도출

∙광화문 복합역사 신설에 따른 광역버스 등 수요예측 및 녹색교통특별대책의   효과분석

*********************************************

- 사업기간 및 총사업비 지방자치단체의 재원 분담비율을 포함한 자금의 조달 방안 및 중단기 자금운용계획

- 장래 수도권 광역철도망 계획과 그 기능에 부합할 수 있도록 시설계획 수립

- 정거장 시스템, 정거장 건설 및 운영계획

- 다른 교통수단과의 연계 수송체계 구축에 관한 사항

4		향후계획

□ 예산 확보: 2019년 본예산 편성

❍ GTX-A노선 광화문 복합역사 신설 타당성 조사 및 기본계획 용역

********************************

□ 향후 추진일정

❍ 2018. 10.: 기술용역 타당성 심사 의뢰(기술심사담당관)

❍ 2019. 3.～12.: 용역 시행

*****************

***********************