문서번호	시설보수과-5653
결재일자	2019.6.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
권순회		신동헌	06/28 이학구
협조

「남산2호터널입구 지하차도외 8개소 정밀점검용역」

착수보고회 개최 결과 보고

2019. 6.

서부도로사업소

시설보수과

「남산2호터널입구 지하차도외 8개소 정밀점검용역」

착수보고회 개최 결과 보고

우리 사업소에서 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 의거 시행중인 「남산2호터널입구 지하차도외 8개소 정밀점검용역」에 대한 착수보고회 개최 결과 보고임.

□ 용역개요

◦ 용 역 명 : 남산2호터널입구 지하차도외 3개소 정밀점검용역

◦ 용역기간 : 2019. 6. 3. ~ 11. 29. (180일)

◦ 계약금액 : 114,411천원

◦ 용 역 사 : 에스큐엔지니어링(주)

◦ 대상시설 현황

시설물명	위치	연장(m)	폭(m)	준공년도	비 고
남산2호터널 지하차도	용산구 이태원동 262-49	310	4	1978년	옹벽 210m
연희지하차도	서대문구 연희동 170-15	108	14.5	1994년	옹벽 38m
남산1호입구 지하차도	중구 충무로 2가 61-3	190	9	1979년	옹벽 130m
홍제천1복개 1구간	서대문구 홍은동 9-698	171	7	1999년
홍제천1복개 3구간	마포구 연남동 487~성산동 51-1	468	9.7~24.9	1991년
홍제천1복개 4구간	마포구 성산로2길 1~성산동 279-1	254	7.5	1991년
잠두봉고가차도	마포구 합정동 절두산성지 앞	20.4	35	2001
한강로다리	용산구 한강로 3가 40-664	16	61.5	1980

□ 착수보고회 개최

◦ 일    시 : 2019. 6. 26(수) 14:30

◦ 장    소 : 서부도로사업소 시설보수과 사무실

◦ 참 석 자 : 5명

- 사업소 : 시설보수과장외 2인

- 용역사 : 책임기술자 정재훈외 1명

◦ 보고내용

- 용역개요, 시설물 현황, 사전조사 및 전차보고서 분석 결과 보고

- 중점 점검사항, 평가계획, 추진일정 및 안전관리계획 등 보고

◦ 보고사진

□ 착수보고 내용에 대한 검토의견

◦ 과업수행 전반

- 과업수행계획을 준수하여 용역 수행토록 하며 공정보고 철저히 할 것

◦ 현장조사 및 시험부문

- 점검 중 긴급 보수가 필요한 사항은 즉시 보고하여 조치할 것

- 재료시험 시행 전 검교정 장비 투입계획 제출

- 탄산화, 염화물함유량, 반발경도, 철근탐사 등 시험위치 선정 기준과 사유를 명확히 하여 사전 시험계획 제출

- 시설물의 손상에 대한 단순한 보수방안이 아닌 내·외부 상태를 연계하여 근본적인 보수보강 방안을 제시하고, 그에 따른 적정 공사범위를 도식화하여 제출할 것

◦ 안전관리 부문

- 터널 점검시 터널 관리자와 비상연락망 항시 유지토록 하고 폭염 등으로 인한 점검자 건강관리에 유의하여 수행하기 바람

- 안전관리 계획대로 우천 예보 시 복개구조물 조사 절대 금지하고, 맨홀 및 출입구 위치를 사전에 파악하여 대피로를 확보하는 등 안전관리에 만전을 기하기 바람.

- 과선교 구간은 코레일과 사전협의하여 허락을 득하고 점검하기 바람 등

□ 향후계획

◦ ‘19. 7~9월  : 외관조사 및 상태평가

◦ ‘19. 9월 말   : 중간보고

◦ ‘19. 10월    : 자문회의, 최종보고

◦ ‘19. 11. 29. : 용역 준공

붙임 : 착수보고 자료 1부.  끝.