＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 및 계약의뢰(2018년 은평구 관내 상수도시설물 유지관리공사)-2차(최종)

우리사업소에서 시행중인 『2018년 은평구 관내 상수도시설물 유지관리공사(장기계속단가계약)』에  대하여 아래와 같이 설계변경(2차-최종) 시행 및 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 은평구 관내 상수도시설물 유지관리공사(장기계속단가계약)

나. 수 급 인 : ***************

다. 계약기간 : 2018.06.15 ~ 2019.06.30

라. 계약금액(도급비)

1) 주요공종 공사비 변경내용

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증․감	주요공종
토 공	**********	**********	***********	아스팔트포장절단 등
부설공	**********	**********	************	스텐관부설공 (D=13mm)등
구조물공	***********	***********	************	몰탈바르기(바닥) T15mm 등
부대공	**********	**********	***********	기어박스 점검 및 정비 등
사급자재비	**********	**********	***********	주름마디스텐레스관 (13mm) 등
포장공	**********	**********	***********	-
부가세 및 요율	***********	***********	************	-
합 계	***********	***********	************	-

2) 계약금액 변경(조정)내용

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	비고(증․감)
도급비	총 부기금액	***********	***********	************
	1차수(2018년)	***********	***********	-
	2차수(2019년)	***********	***********	************

마. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 계약물량 증·감

바. 최대이행금액 : 300,000,000원(변경없음)

사. 예산과목

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(가압장,배수지 등 시설물유지관리)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비(노후밸브정비)

붙임 1. 설계변경 심의결과보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계변경심의결과서 1부.

4. 변경합의서(최종) 1부. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	권영안		시설관리팀장	이준호		시설관리과장	김홍준		서부수도사업소장	06/28 박영헌
협조자	주무관	구준모
시행	시설관리과-12958	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3694	/전송	02-3146-3739	/	kwon1901@seoul.go.kr	/	부분공개(7)