문서번호	교량안전과-11563
결재일자	2019.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		박찬규	07/01 김종호
협조
	주무관		이우근

2019년도 및 7월 점검을 위한

강구조시설물 안전점검 및 품질확보 계획

2019.  7

안전총괄실

(교량안전과)

2019년도 및 7월 점검을 위한

강구조시설물 안전점검 및 품질확보 계획

우리시에서 관리하고 있는 강구조 도로시설물에 대한 안전점검과 공사 중인 강구조시설물의 품질점검을 실시하여 안전성을 확보하고 품질향상에 기여코자 함

Ⅰ		점검 개요

□ 필요성

○ 우리시에서 관리하고 있는 강구조 도로시설물 및 현재 진행 중인  강구조시설물 현장에 대한 안전점검 및 품질관리 필요

○ 정밀안전진단 시행시 강구조물 분야의 점검계획서 검토 및 진단 부실여부 관리가 요구됨

□ 점검 대상 : 총 121개소

계	강구조시설물 안전점검					강구조공사장 품질 점검				정밀안전진단 용역 강구조분야
	소계	한강상 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	소계	신규	강교 제작장	기존시설물보수공사장
121	97	19	44	31	3	21	4	3	14	3

□ 점검 착안사항

○ 강구조교량팀장과 용접관리 전문관(2)에 의한 전문적 정밀점검

○ 현장 및 서류 점검 병행 시행

○ 매월 3~6개 시설물 점검 및 공정에 따른 공사장 점검

○ 지적사항은 강구조 시설물에 통보하고, 문제점은 “시설물 점검 관리대장”에 기록 후 지속 관리

Ⅱ		6월 점검 추진실적

□ 추진실적

구분	공용중 시설물 안전점검	신설 및 보수 공사장 (강교 제작장 포함)	비 고
계 획	4개 (동작대교, 한남1고가, 천호대교, 시흥IC교)	6개 현장 (월드컵대교건설공사, 올림픽대로~여의도간진입램프설치공사보라매고가, 성수대교, 가양대교, 도림천고가 보수공사)	<공용중 시설물> ·집중점검 시행으로 교체 점검 - 천호→한강, 시흥IC교→행주대교 - 한남1고가→보라매고가 <공사장 점검> ·성수대교, 보라매고가, 가양대교, 도림천고가 보수(도장)공사 - 공사준비 중으로 7월 예정 ·월드컵대교건설공사 - 7월 강교가조립 실시 예정 ·올림픽대로~여의도간진입램프설치공사 - 7월 현장도장 실시 예정
실 적	5개 (동작대교, 보라매고가, 동호대교, 한강대교, 행주대교)	-

※ 2019년 추진실적 누계(6월까지)

· 공용중 시설물 안전점검 : 23개 시설물 계획 중 22개 시설물 점검완료

· 신설 및 보수공사장 안전점검 : 13개 공사장 계획 중 7개 공사장 점검완료

[시설물 점검]

○ 동작대교

- 점검일시 : 2019.06.24

- 점검구간 : 남단 접속교 P13~PS5

- 점검결과 : 슬라브 누수로 인한 하부거더 부식 등 38건 결함사항 적출

슬라브 누수로 하부 부식	하부플렌지 볼트 탈락(1개)

○ 행주대교

- 점검일시 : 2019.06.11

- 점검구간 : 하류교 사장교구간(P11~P19)

- 점검결과 : 강박스 내부도장 비둘기배설물 적치 등 15건 결함사항 적출

강박스 내부 비둘기배설물	강박스 쓰레기 미제거

○ 한강대교(상행)

- 점검일시 : 2019.06.19

- 점검구간 : 게르버 신교 P9~A2

- 점검결과 : 하부플렌지 연결판 및 볼트 녹 발생 등 34건 결함사항 적출

하부플렌지 연결판 및 볼트 부식	거셋트 볼트 탈락

○ 동호대교

- 점검일시 : 2019.06.20

- 점검구간 : 하류측 P16~P25 R램프

- 점검결과 : 강박스 내부 연결판 누수로 하부 오염 등 14건 결함사항 적출

연결판 누수로 하부 오염	신축이음 누수로 하부 녹발생

○ 보라매고가

- 점검일시 : 2019.06.13

- 점검구간 : 좌안 P51~P87

- 점검결과 : 신축이음 누수로 하부 녹발생 등 14건 결함사항 적출

신축이음 누수로 하부 녹발생	신축이음 누수로 하부 녹발생

Ⅲ		2019년 7월 세부 점검 계획

		공용중인 강구조시설물 안전점검 (4개소)

연번	공사명	관리기관	점검일시	비고
1	천호대교(P3~P7)	교량안전과	4,5일
2	동작대교(P1~P4)	교량안전과	16,17일
3	한남1고가(하행선)	교량안전과	11일
4	시흥IC	강서도로사업소	25일

※ 점검일은 내부 일정에 따라 변경될 수 있으며, 팀별 시설물 담당자와 합동 점검

	점검내용(중점관리 사항)
⦁ 교량 받침 이동량 적정유무 확인(강재 수축·팽창량 확인) ⦁ 교량 하부 누수 여부 확인(신축이음하부 등의 누수 발생여부) ⦁ 교량상부 보도 및 차도측 물(눈) 고임 발생 여부 ⦁ 고장력 볼트 체결부(Splice부 등)의 볼트 파단 발생 여부 ⦁ 용접결함으로 인한 시설물의 손상 여부 점검 ⦁ 기타, 강구조물 부식발생 및 도장상태 확인 등

		강구조시설물 건설 및 보수공사장(6개 공사 현장)

연 번	공사명	공사내용	발주부서	비 고
1	월드컵대교 건설공사	폭-31.4m(6차로)] 본선연장-1980m(사장교)	도시기반시설본부 토목부	공정에 따른 순회점검
2	올림픽대로~여의도간진입램프설치공사	폭-6.4m 연장-712.6m	도시기반시설본부 토목부
3	성수대교 보수(도장)공사	외부도장 :17,184㎡ 내부도장 : 4,998㎡	교량안전과
4	보라매고가 보수(도장)공사	외부도장 :3,691㎡	교량안전과
5	가양대교보수공사	외부도장 : 5,989㎡	교량안전과
6	도림천고가보수공사	외부도장 : 4,741㎡	교량안전과

※ 각 공사 일정에 따라 발주부서 및 팀별 담당자와 와 협의하여 현장 점검일 조정

	점검내용(중점관리 사항)
⦁ 강교내부 빗물 유입 가능 여부 확인 ⦁ 점검자 및 보수작업자 이동 편의상태 확인 ⦁ 적절한 자재사용 점검 ⦁ 강교제작 및 용접에 대한 품질관리 이행실태 점검 ⦁ 도장 품질관리 이행실태 점검(대기온도 및 이슬점 등 도장조건 확인) ⦁ 유자격 용접사의 현장작업 여부, 용접화재 등 안전관리 상태 점검

Ⅳ		향후 조치계획 및 행정사항

□ 공사장 지적사항에 대하여는 [시정요청서 발부]하여 발주부서에 통보

○ 지시내용을 “시정요청서 관리대장”에 기록 후 사후관리

□ 강구조 시설물의 점검결과를 담당부서에 통보

○ 문제점의 내용은 “시설물 점검 관리대장”에 기록 후 지속 관리

□ 교량 또는 공사장이 대중교통을 이용하기 어려운 곳에 위치함을 고려하여 점검에 필요한 이동수단(점검차량 또는 업무택시) 사용

붙 임 : 1. 공사장 시정요청서 양식 1부.

2. 강구조 시설물 현황 1부.

3. 강구조 시설물 공사장 현황 1부. 끝.