투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(여성정책담당관)
(경유)
제목	설계변경 검토요청에 대한 회신(스페이스 살림 조성공사)

1. 여성정책담당관-5976(2019.4.22.), -8053(2019. 5. 23.)호와 관련입니다.

2. 『스페이스 살림 조성공사』와 관련 귀 부서의 건축분야 설계변경 요청사항에 대하여 검토하고, 이를 반영한 변경 설계도서를 송부하오니 요청사항에 대한 설계반영의 여부를 검토후 2019. 7. 12.(금)까지 통보바랍니다.

3. 아울러, 현재 공정 추진상 추가적인 설계변경 사항이 발생할 경우 공사기간이 연장되어 사업계획이 변경될 수 있음을 알려드립니다.

붙임 1. 사업의뢰부서 설계변경 요청사항 1부.

2. 건설사업관리자 검토의견서 1부.

3. 변경도면 1부(별도송부).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	남광연		건축관리과장	차무흥		건축부장	07/01 임인구
협조자
시행	건축부-11151	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2658	/전송	02)3708-2659	/	kynam01@seoul.go.kr	/	부분공개(5)