투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	계약변경 의뢰(월드컵분수 이전 설치공사)

1. 우리과에서 시행 중인 ｢월드컵분수 이전 설치공사｣에 대하여 아래와 같이       변경 계약을 시행하고자 하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 월드컵분수 이전 설치공사

나. 계약업체 : ㈜합동종합건설 대표****

다. 공사기간 : 2019.05.29. ~ 2019.7.27.

라. 계약변경 내용

1) 계약금액 : 변경사항 없음

2) 계약기간

- 변경전 : 2019.05.29. ~ 2019.7.27.

- 변경후 : 2019.05.29. ~ 2019.08.26.

마. 예산과목 : 치수 및 하천관리, 치수사업, 재난예방(재산관리기금재난계정),     시설비

붙임  1. 월드컵분수 이전 설치공사 계약변경 보고서 1부

2. 합의각서 1부. 끝.

	기반시설과장
전문관	석대창		기반시설과장	07/01 라철흠
협조자
시행	기반시설과-1942	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0628	/전송	02-3780-0744	/	s1d9c63@seoul.go.kr	/	부분공개(5)