＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	암사아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경시행(암사 과산화수소 약품투입설비 제조구매설치)

1. 우리 센터에서 시행중인 『암사 과산화수소 약품투입설비 제조구매설치』에 대하여 시공물량 증·감 및 제경비 정산에 따른 설계변경을 다음과 같이 시행코자 합니다.

가. 건    명 : 암사 과산화수소 약품투입설비 제조구매설치

나. 계약금액 : *************2

다. 계약기간 : ‘19. 4. 12. ~ 19. 7. 9.

라. 계약업체 : ***************

마. 세부내역 : 붙임참조

바. 변경사유 : 시공물량 증·감 및 제경비(보험료 등) 정산

사. 변경내역

당 초 금 액	변 경 금 액	증 · 감
************	************	*************

아. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비(시설비), 정수장시설정비(11101) - 과산화수소 약품투입설비개선

※ 2019.07.01. 증추산필 [추산필:2019. 3.14 #6424]

붙임 : 설계변경 심의결과, 설계변경내역서, 합의서 각 1부.  끝.

★주무관	조광호		주무관	이은숙		정수시설과장	양영민		암사아리수정수센터소장	07/02 유성종
협조자	주무관	김재성		주무관	변민용
시행	정수시설과-7252	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25) 한강사업본부	/
전화	02-3780-0660	/전송	02-3780-0744	/	lovetou77@seoul.go.kr	/	부분공개(5)