＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(가리봉동 121~127번지간 송배수관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인 『가리봉동 121~127번지간 송배수관 정비공사』에 대하여 설계변경 사전심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 가리봉동 121~127번지간 송배수관 정비공사

나. 도 급 자 : ************

다. 공사기간 : ’19. 3. 12. ~ 7. 9.

라. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비, 노후상수도관(송배수관)정비

마. 설계변경 사유 : 공종별 계약물량 증ㆍ감 및 신공종 발생

바. 설계변경 내역                                                    (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
도급비	****	***********	***********	*************
	***	**********	**********	************
	*	***********	***********	*************

붙임  1. 설계변경 계획 1부.

2. 서울시설공단 검토보고서 1부.

3. 설계변경 사전심의결과서 1부.

4. 합의서 1부.

5. 제비율 검증표 및 설계변경 내역서 부. 끝.

주무관	강환희		급수설비팀장	문병희		급수운영과장	김정수		강서수도사업소장	07/03 배현숙
협조자	주무관	최선보		주무관	김영화		행정관리팀장	송성하
시행	급수운영과-15039	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155(신정동 319-15)	/
전화	02-3146-3957	/전송	02-3146-3989	/	20160125470@seoul.go.kr	/	부분공개(7)