문서번호	기술심사담당관-12476
결재일자	2019.7.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		기술관리팀장	기술심사담당관
김효환		이상석	07/03 권완택
협 조
	주무관			선성호

신기술·특허적용 현장 시공중 평가결과 보고

[****************************]

2019. 6.

기술심사담당관

신기술․특허 적용현장 시공중 평가결과 보고서

▢ 점검개요

○ 일    시 : ************************

○ 장    소 : ****************

○ 공사기간 : ′19. 4. 8. ~ ′19. 12. 31.

○ 신기술명 : **********************************************************

○ 점 검 자 : 4명(외부전문가 2명, 내부직원 2명)

□외부전문가 (2명)	********************************************
	****************************************
□내부직원 (2명)	기술심사담당관 전 문 관 김효환
	기술심사담당관 주 무 관 선성호

▢ 중점 점검사항

○ 신기술·특허 적용현장의 시공관리 및 안전관리 상태

- 현장인력 배치의 적정 여부

- 신기술(특허) 자재 및 장비사용의 적정 여부

- 현장근로자 안전관리의 적정 여부 및 교통대책 수립 적정 여부 등

○ 공사 목적물의 품질 및 성능 상태

- 공사전반에 걸친 완성도

- 주요 공종 시설물의 도면, 시방서 준수 여부 등

○ 신기술·특허 심의 조치결과 반영 여부 확인

- 신기술심의 지적사항 반영 여부

- 신기술(특허) 적용관련 중대한 변경사항의 조치여부 등

▢ 점검결과

○ 지적내용

연번	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	시공 관리	· 기존 포장 절단 및 제거 소요시간(약 1시간 30분) 과다로 교통통제에 따른 시민불편 초래 ※특별시방서: 포장체 절단 및 제거시 25분 소요	· 맨홀 보수 시공시간이 단축될 수 있도록 기존 포장체 절단 단축방안을 강구할 것	-
2	시공 관리	· 원형파쇄기(살수형 기존포장 원형 절삭장비)의 살수장치(호스)가 제거된 상태로 장비관리 미흡	· 살수형 기존포장 원형 절삭장비의 사전점검 및 정비를 철저히 할 것	사진1
3	환경 관리	· 기존 포장 절단시 발생된 파쇄물의 맨홀내 유입방지시설 미흡	· 절단시 맨홀내 폐기물이 유입되지 않도록 폐합된 장비 사용 등 시공관리 철저히할 것	사진2
4	품질 관리	· 아스팔트 혼합물의 현장 제조후 운반용기 개선필요	· 적정 용기를 비치하여 도로에 흘리지 않도록 조치할 것	사진3
5	안전 관리	· 교통통제시 안전시설 설치 및 신호수 배치가 미흡하고, 공사장 전방 사전예고판 미설치	· 현장 도로여건에 적합한 안전시설 설치 및 신호수 배치하여 공사중 교통처리 및 안전관리를 철저히 할 것	사진4
6	환경 관리	· 절단작업시 발생된 잔여물로 시공후 도로 청소 필요	· 시공완료후 물청소 실시 등 현장주변 정리 철저히할 것	사진5

○ 평가결과

평가결과	평균	합계	위원1	위원2	비고
**	****	*****	****	****

▢ 행정사항

○ 발주부서에 점검 지적사항 및 조치결과 제출 요청 통보

○ 신기술 소개의 장 등 지적사항 전파

붙 임 : 1. 신기술·특허 적용현장 점검 시공평가표 2부.

2. 신기술·특허 적용현장 점검 주요 지적사항 2부.

3. 신기술·특허 적용현장 점검결과 현장사진 1부.  끝.