문서번호	기전과-7257
결재일자	2019.7.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
노민영		서수일	07/04 이학구
협 조

2019년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사

시행 계획 보고(서부지원 앞)

2019.  7.

서부도로사업소

(기 전 과)

2019년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사

시행 계획 보고(서부지원 앞)

2019년 중앙버스전용차로 흐름개선 사업의 일환으로 마포구 마포대로 서부지원 주변 교차로의 교통안전시설을 개선하여 교통의 흐름을 원활히 하고 시민들의 편의를 증대하고자 함.

□ 관련 근거

○ 2018년 제7차 교통안전시설 심의결과 통보(하달)

- 서울특별시지방경찰청 교통관리과-18294(2018.07.24.)

○ 중앙버스전용차로 흐름개선사업 예산 재배정 알림

- 교통운영과-11186(2019.6.28.)

- 예산 재배정액: 63,940,000원

□ 공사 개요

○ 공 사 명: 2019년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사(서부지원 앞)

○ 공사위치: 마포구 마포대로 서부지원 주변 교차로

○ 공사내용

- 기전과: 교통신호기(차/보) 신설 및 철거

- 도로보수과: 노면표시 개선

○ 소요예산: 금55,050,000원

○ 예산과목: 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 버스서비스 이용재고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비

□ 공사 내용

○ 교통신호지주 신설 및 철거 각 2본

○ 차량신호등 신설 및 철거 7조, 보행신호등 신설 2조

○ 가공 신호 케이블 신설

□ 공사 시행 계획

○ 계약방법: 전자공개 수의계약

○ 입찰방법: 제한입찰(지역제한)

- 근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조제1항제6호, 동법 시행규칙 제24조제1호다항(전기공사 5억원 이하)

○ 입찰참가자격

- 전기공사업법에 의한 전기공사업등록을 한 업체로서, 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

○ 공사기간: 착공일로부터 90일

□ 향후 추진 계획

○ 2019. 7.: 공사 발주

○ 2019. 7.: 계약 체결 후 착공

○ 2019. 9.: 준공 완료 보고

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 설계도면 1부.  끝.