문서번호	투자창업과-7053
결재일자	2019.7.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	창업기반조성팀장	투자창업과장
노은영	백명숙	07/04 최판규

2019년 서울창업카페 교대점 조성 인테리어공사 설계변경 보고

2019. 7

투자창업과

2019년 서울창업카페 교대점 조성 인테리어공사 설계변경 보고

서울창업카페 교대점 조성 인테리어공사와 관련 현장여건 변경에 따른 신규공종 추가 및 시공물량 변경으로 설계 변경하고자 함

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2019년 서울창업카페 교대점 조성 인테리어공사

○ 위치/규모 : 교대역 13·14번 출구 지하보도 내 서울교통공사 쇼핑몰/184㎡

○ 계약금액 : 금153,575,880원(계약체결일 : ’19. 04. 25.)

○ 계 약 자 : ㈜디자인지엔에스 대표 김건호

○ 계약기간 : 2019. 04. 25.~2019. 07. 06.

○ 공사내용 : 철거, 교체, 가설, 가구공사 및 냉방기기 설치 등 설비·배관공사

□ 정산내역

○ 설계금액 조정

구분		공사금액	증·감금액		증·감 사유
도급비 (준공금액)	당 초	153,575,880	증*	27,480,430	냉방설비 시공구간 증가 및 신규물량 추가 발생
	변 경	181,056,310

○ 주요 설계변경 사유

- 현장여건상 소방배관 변경작업 수반 및 수압 위험 등으로 노출천장 변경

- 냉방기기설치 시공구간 증가 및 시스템에어컨 변경으로 공사비 증액

- 지하철역사 특성상 자재운반 양중인건비(야간/주말) 등 추가비용 발생

- 벽체시스템 구조 및 마감재 변경 등 공종변경 및 설계누락 신규공종 발생

- 건강보험료, 연금보험료, 요양보험료 등 제경비 감소 발생분 반영 등

□ 향후계획

○ ’19.07.04 : 설계변경 계약 의뢰

○ ’19.07.06 : 공사준공

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 변경계약 합의각서 1부.  끝.