문서번호	도로보수과-6294
결재일자	2019.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
류승휘		강종훈	07/01 이학구
협 조
	주무관			代임동운
	주무관			고석상
	주무관			정의현
	주무관			권세봉

2019년 중앙버스전용차로흐름 개선사업

시행계획 보고(통일로 외 2개소)

2019.  06. 28.(금)

서부도로사업소

(도로보수과)

2019년 중앙버스전용차로흐름 개선사업

시행계획 보고(통일로 외2개소)

중앙버스전용차로 구간 중 통일로 경희궁자이아파트 앞 외 2개소에 대하여 아스팔트 포장, 차로재구획, 무단횡단금지시설 등을 설치하기 위한 개선사업을 시행코자 함.

□ 관련근거

○ 2019년 중앙버스전용차로 흐름개선사업 시행계획 알림

- 교통운영과-1108(2019.01.18.)

○ 2019년 중앙버스전용차로 흐름개선 사업비 재배정

- 교통운영과-2166(2019.02.11.) 예산배정액 : 332,180천원

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2019년 중앙버스전용차로 흐름개선사업

○ 총사업비 : 332,180천원

○ 예산과목

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 버스서비스 이용제고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비(401-01)

○ 구간별 사업내용

- 서대문구 통일로 경희궁자이아파트 앞

: 중앙선 절선, 노면표시 개선

- 마포구 양화로 합정역사거리

: 중앙버스정류장 연장설치, 보도포장, 경계석 설치, 차로폭 조정, 무단횡단 금지시설 설치

- 서대문구 통일로 홍은사거리

: 아스팔트 평삭 및 포장, 유턴전용차로 설치, 미끄럼방지포장

○ 구간별 위치도

1. 서대문구 경희궁자이아파트 2, 4단지 앞 (통일로)
2. 마포구 합정역 사거리 (양화로)
3. 서대문구 홍은사거리 (통일로)

□ 추진계획

연번	구 간	세 부 내 용	사업비 (천원)	시 행 방 법	비 고
1	서대문구 통일로 경희궁자이@ 앞	노면표시 제거 및 도색 1,070m	8,720	교통안전시설(노면표시) 유지보수공사에 포함 시행
2	마포구 양화로 합정역사거리	노면표시 제거 및 도색 1,725m	12,890	교통안전시설(노면표시) 유지보수공사에 포함 시행
		경계석 및 보도포장 196㎡	65,106	도로부속시설물 일상유지 보수공사에 포함 시행
		보행자방호울타리설치 49m	14,779	관급구매(현장설치도)
		무단횡단금지시설설치 23m	4,625
3	서대문구 통일로 홍은사거리	노면표시 도색 3,919m	20,630	교통안전시설(노면표시) 유지보수공사에 포함 시행
		아스팔트포장(t=5cm) 46.72a	164,410	노후포장도로 정비공사(2구역)에 포함 시행
		미끄럼방지포장 1,275㎡	41,020	관급구매(현장설치도)
	계		332,180

□ 검토보고

○ 긴급을 요하는 공사로서 중앙버스전용차로 흐름개선공사로 별도 발주 시 업체 선정부터 아스콘 및 특수페인트 등의 자재 구매까지 시일이 소요됨에 따라, 현재 진행 중인 교통안전시설(노면표시), 도로부속시설물 일상유지, 노후포장도로 정비공사(2구역)에 포함하여 시행

○ 다만, 노후포장도로 정비공사에 소요되는 일반 및 개질 아스콘의 자재 공급원 승인이 7월에 가능함에 따라 본 개선사업의 조속한 처리를 요하는 시민 숙원 사업(교통운영과-1743, 2019.1.30.)취지에 맞게 우기 전 긴급히 정비를 위해 아스콘 자재는 도로굴착복구공사로 정산

○ 또한, 본 사업구간내 중앙버스전용차로는 2018년 서울형포장구간이나 유턴차로 신설에 따른 차로 전면 재구획 사업임을 감안하여 도로관리과와 유선 및 현장협의 결과 서울형포장구간에서 제외하기로 결정되어 당초 20cm→5cm 절삭포장으로 변경 시행

○ 상기 사업에 대해 선 시공하고 추후 정산

□ 향후계획

○ 2019. 07. 01.: 개선사업 작업지시 및 공사 시행.

○ 2019. 08. 31.: 개선사업 완료.

○ 2019. 09. 20.: 설계변경 정산 및 개선사업 결과보고.

붙 임  1. 노면표시 설계내역서 1부.

2. 토목공사 설계내역서 1부.

3. 개선사업 설계도 3부.

4. 관련 문서 1부.  끝.