문서번호	건축부-11413
결재일자	2019.7.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
★주무관	건축총괄과장	건축부장	시설국장
김준회	유현수	임인구	07/04 김승원
협 조
	주무관			박도원
	주무관			마동훈

속초 공무원 수련원 증축 및 리모델링사업 설계용역 시행계획

2019. 7

도시기반시설본부

건축부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

속초 공무원 수련원 증축 및 리모델링 사업

설 계 용 역  시 행 계 획

연수원 수요급증에 따른 부족한 연수시설을 확충하고, 직원 여가복지 증진 및 기관연수 활성화 기여하고자 추진하는 『속초 공무원 수련원 증축 및 리모델링 사업』의 설계용역을 시행하고자 함

시행근거

○ 서울특별시 속초수련원 증축 기본계획(인력개발과-12932, 2018.6.12)

○ 설계공모 심사결과(도시공간개선단에서 추진)

- 당선작 : 솔토지빈건축사사무소 대표 조남호

- 중간 및 실시설계권 부여(설계용역비 1,133백만원)

○ 설계용역 계약체결 및 사업추진 의뢰(인력개발과-13665, 2019.6.18)

사업개요

○ 사 업 명 : 속초 공무원 수련원 증축 및 리모델링 사업

○ 위    치 : 강원도 속초시 노학동 721-3, 산143

○ 지역지구 : 도시지역, 자연녹지지역, 자연경관지구

○ 규    모 : 지하2층/지상8층, 연면적 17,576.66㎡

(증축)별동 지하2층/지상4층, 연면적 10,333.66㎡

(리모델링)기존동 지하1층/지상1층/지상8층, 연면적 1,530㎡

○ 용    도 : 교육연구시설(연수원)

○ 사업기간 : 2017년 8월 ~ 2022년 2월

○ 총사업비 : 241억원(공사비 230억, 설계비 11억)

□ 사업대지
위 치 도	배 치 도

용역개요

○ 용 역 명 : 속초 공무원 수련원 증축 및 리모델링 설계

○ 설계기간 : `19.07. ~ `20.07.(착수일로 부터 365일)

○ 설 계 비 : 1,133백만원(부가세 포함)

○ 설 계 자 : 솔토지빈건축사사무소 대표 조남호

○ 계약방식 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 4호 자목에 따라 설계공모 당선자(솔토지빈건축사사무소 대표 조남호)와 수의계약을 체결하고 설계용역 시행

추진경위

○ 2019. 01.25 : 국제일반설계공모 공고

○ 2019. 04.22 : 당선작 발표(솔토지빈건축사사무소 대표 조남호)

○ 2019. 06.18 : 설계용역 계약체결 및 사업추진 의뢰

○ 2019. 07.    : 과업내용서 등 담당분야별 검토 완료(설비부, 방재부)

향후계획

○ 2019. 07월     설계용역 계약 및 착수
○ 2020. 07월     설계용역 준공(설계 12개월)

○ 2020. 09월     건설사업관리용역 및 공사발주(공사발주 3개월)

○ 2022. 02월     공사준공(공사기간 17개월)

붙임 : 1. 속초수련원 증축 기본계획 1부.

2. 설계공모 작품심사 결과 통보 공문 1부.

3. 설계공모 당선안 보고 1부.

4. 설계용역 및 사업추진 의뢰 공문 1부.

5. 설계용역 과업내용서 1부.(용량초과)

6. 설계용역비 산출내역서 1부(용량초과).  끝.