투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	설계변경 시행 및 계약의뢰(2019년 한강공원 어린이놀이터 보수정비사업 폐기물처리용역)

1. 녹지관리과-2113(2019.7.2.)호와 관련한 내용입니다.

2. 2019년 한강공원 어린이놀이터 보수정비공사 폐기물처리용역을 다음과 같이 설계변경 시행 및 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2019년 한강공원 어린이놀이터 보수정비공사 폐기물처리용역

나. 위    치 : 이촌 서빙고어린이놀이터, 망원어린이놀이터

다. 용역내용

- 폐기물 운반 : 122.491㎥(폐합성수지 119.449㎥ / 혼합폐기물 4.042㎥)

- 폐기물 처리 : 85.26ton(폐합성수지 82.915ton / 혼합폐기물 2.345ton)

라. 소요예산 : 금20,438,000원(금이천만사십삼만팔천원)

마. 용역기간 : 2019. 6. 17. ~ 7. 16.

바. 도 급 자 : **************

사. 설계변경 사유 : 기존 놀이터 바닥 고무칩포장 철거결과 반출물량 증가로 설계변경

아. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총용역비		20,438,000	28,078,455	증 7,640,455
도급비	공급가액	18,580,000	25,525,869	증 6,945,869
	부가가치세	1,858,000	2,552,586	증 694,586
	계	20,438,000	28,078,455	증 7,640,455

아. 예산과목 : 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 이용시설 유지관리,

시설비(401-01)

붙임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부. 끝.

	공원부장
주무관	김현정		공원부장	07/04 代최병언
협조자	총무과장	한정훈
시행	녹지관리과-2154	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0846	/전송	02-3780-0745	/		/	부분공개(7)