문서번호	조경과-9587
결재일자	2019.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		실무사무관	조경과장
이진범		송복식	07/04 代김호석
협조

가로수 생육환경 개선사업(양천구) 설계심의 결과보고

2019. 7.

푸른도시국

조  경  과

가로수 생육환경 개선사업(양천구) 설계심의 결과보고

2019년 가로수 생육환경 개선사업(양천구)에 대해 설계심의를 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

사업개요

❍ 사 업 명 : 가로수 생육환경 개선사업(양천구)

❍ 위    치 : 양천구 목동로 일대 등

❍ 사업기간 : 2019. 7. ~ 10.

❍ 사업금액 : 금 156백만 원

❍ 사업내용 : 가로수 위험수목 교체, 가로수 보호시설 개선, 띠녹지 정비 등

- 가로수 : 동공목 교체 및 공분 메워심기, 가로수 보호시설내 빗물유입 개선

- 띠녹지 : 노후 목재경계목 정비, 띠녹지 보식 등

세부 사업내용

❍ 목동로 녹지대 정비

녹지대(목동로 A구간) 식재 계획도

녹지대(목동로 B구간) 식재 계획도

- 띠녹지 보호대 설치

띠녹지 가각부에 설치하여 훼손 방지	보호대 입면도(줄사철 등으로 녹화)

❍  목동로 가로수 보호판 정비(빗물유입 유도)

가로수 식수대 정비 계획(식수대 면적확대 및 쇄석포설하여 빗물 저장기능)

- 보호판 너비를 1.2m에서 2.2m(좌우 0.5m)로 확장

- 확장된 너비에는 쇄석 포장하여 빗물 저장 기능

- 크림프 철망으로 쇄석 유실 방지

설계심의 개요

❍ 심의구분 : 자체심의

❍ 심의내용 : 설계 적정 여부

❍ 심의결과 : 조건부 가결

심의결과

❍ 띠녹지내 획일적인 단일수종 식재는 지양하고 다양하게 식재하여 다채로운 경관 조성, 특히 하자가 많이 발생하는 회양목과 영산홍 등 키 작은 관목류의 비중은 낮추고 키 큰 관목류 비중을 높일 것(이식시에도 가급적 혼식할 수 있도록 식재 위치 재조정)

❍ 띠녹지 보식시 토양개량을 실시하여 활착율을 높일 것

❍ 띠녹지 경계는 원주목이 아닌 철재 분리재(엣지형)로 설치토록 하고, 충분한 두께의 제품으로 설계하여 변이가 없도록 할 것

❍ 띠녹지 보호휀스의 모서리는 둥글게 처리하여 안전사고 예방

❍ 동공발생 가로수의 대해서는 세부조사 및 경중을 구분하여 최소한으로 제거토록 하고, 가급적 동일수종으로 식재하되, 불가할 경우 느티나무, 칠엽수 같은 그늘수종 검토(이팝나무 식재 지양)

❍ 기존 가로수 중에 보호판이 제거된 곳은 식생 조성(잔디 및 잔디매트 설치 등)

❍ 빗물 유입용 가로수 쇄석포장은 시범설치하여 운영한 후 확대하도록 하고 우선적으로 띠녹지를 조성하여 빗물을 유입하는 것이 원칙임

- 목동로 중 사람 통행이 많은 목동역 인근에 시범설치하도록 하고,

- 진명여고 앞 등은 가로수 하부에 띠녹지를 조성하여 쾌적한 학교 통학로가 되게 조성

보고자 의견

❍ 심의 내용을 자치구에 통보하여 내실있는 사업이 되도록 추진

붙임문서 1. 설계심의자료 1부

2. 설계심의 결과서 1부.  끝.