문서번호	생태환경과-1508
결재일자	2019.7.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		생태환경과장	공원부장
김정화		최병언	07/05 代최병언
협 조

『미루나무길 조성사업』설계변경 시행

2019. 7.

『미루나무길 조성사업』설계변경 시행

한강의 자연성을 회복하기 위해 시행 중인「미루나무길 조성사업」에 대하여 현장여건에 따른 변경사항이 발생되어 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

※ 서울시설공단 공사감독3처-5436(2019.07.5.) 설계변경서 제출

▢ 사업개요

○ 공 사 명 : 미루나무길 조성사업

○ 위    치 : 이촌․망원․난지한강공원(11km)

○ 공사내용 : 미루나무 1,037주 식재

○ 공사기간 : 2019. 4. 11. ~ 7. 9.

○ 도 급 비 : 금814,924,000원

○ 도 급 자 : 우희조경(주) 대표 곽노정

▢ 주요변경 내용

○ 현장여건 반영에 따른 지주목 규격확대

▢ 설계변경 내용

구 분	변경사유 및 내용	비 고
수 목 식 재	○ 강풍이 많은 한강여건상 지지력을 높이고자 지주목 규격확대
	▸양버들A(R12, 삼발이Ф45×1800×3EA) : 972주 → 0주
	▸양버들A-1(R12, 삼발이Ф60×2400×3EA): 0주 → 972주
	▸양버들B(R13, 사각Ф55×1800×4EA) : 259주 → 0주
	▸양버들B-1(R13, 삼발이Ф70×2700×3EA): 0주 → 259주
	▸양버들C(R14, 사각Ф55×1800×4EA) : 35주 → 0주
	▸양버들C-1(R14, 삼발이Ф70×2700×3EA): 0주 → 35주
	▸양버들D(R15, 사각Ф55×1800×4EA) : 41주 → 0주
	▸양버들D-1(R15, 삼발이Ф70×2700×3EA): 0주 → 41주

▢ 설계변경 금액

○ ┏ 당   초 : 금814,924,000원

┗ 변   경 : 금818,100,000원(증3,176,000원)

(단위 : 원)

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		827,161,880	830,337,880	3,176,000
도급액	공급가액	740,840,000	743,727,273	2,887,273
	부가가치세	74,084,000	74,372,727	288,727
	계	814,924,000	818,100,000	3,176,000
관급자재비		12,237,880	12,237,880	0

○ 예산과목

- 한강공원이용 및 생태환경개선, 한강 자연성 회복, 한강숲조성, 시설비

▢ 조치계획

○ 위와 같이 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 서울시설공단 관련공문 1부.

2. 설계변경도서 1부.  끝.