투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제 목	교통소통 대책에 따른 도로공사장 점용기간 연장요청

1. 교통운영과-1546호(2019.1.28.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선사업』에 대한 교통소통 처리계획에 따른 도로공사장 점용기간이 도래되어 아래와 같이 연장코자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다

[점용기간 연장 현황]

- 기간연장 : (당초)2019.6.30. →(변경)2019.11.30

- 연장사유 ┍ 동절기로 인한 착공 지연 및 관급자재 수급지연

┕ 자치구(종로) 요청사항 반영을 위한 공사중단.

따로붙임 : 준공기한연기 검토보고서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김성권		광역도로과장	박일연		토목부장	07/05 김용제
협조자	주무관	이준범
시행	토목부-12097	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2557	/전송	02-3708-2599	/	sssggk@seoul.go.kr	/	대시민공개