문서번호	기반시설과-1928
결재일자	2019.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
박지수		라철흠	06/28 전영주
협조

『2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)』

작업지시(7차) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

한강사업본부

(시설부)

『2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)』

작업지시(7차) 검토보고

한강공원 내 하천시설물 특별점검 지적사항 및 민원사항 등을 처리하기 위한 「2019년 한강공원 진․출입시설 유지보수 공사(연간단가)」 제7차 작업지시 건에 대하여 검토 보고 드림

1		관련근거

○ 특별점검 결과 송부 및 정비일정 제출요청 보고(치수과-2094호)

- 육교 및 교량 접속시설(11개소) 지적사항 정비 일정 요청

○ 응답소 현장 민원(접수번호 20190626800395호)

- 성수구름다리 조류 배설물 처리 요청

2		공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2019. 4. 1. ~ 2019. 11. 30.

○ 계약금액 : 304,068천원

○ 계약상대자 : ㈜민정건설 대표 백승언

○ 공사규모

- 진·출입시설 보수 : 데크보수 620㎡, 조류방지망 설치 200㎡, 철재면 재도장 150㎡, 오일스텐재도장 440㎡ 등

- 천사의계단 보수 : 석재판 철거 후 재설치 138㎡, 도막식 방수 138㎡

3		작업지시 개요

○ 소요예산 : 50,000천원

○ 작업위치 : 육교 및 교량 접속시설(천호대교 남단 접속계단 등 11개소)

○ 작업기간 : 2019. 07. 02. ~ 2019. 07.31.

○ 작업내역

연번	공원별	시설명	지 적 사 항	조 치 의 견
1	광나루	천호대교남단2	∘계단 시점부 안전난간 상부 파손	∘안전난간 보수
2	뚝 섬	잠실철교 북단 1, 2	∘강변북로 횡단구간 중앙부 체수	∘체수부 노면구배 조정
3	〃	잠실대교 북단	∘육교기둥 기초 연결볼트 표면부식	∘녹제거 및 도장
4	〃	성수구름다리	∘조류 배설물 처리요청 민원(응답소 민원)	∘조류유입 방지망 설치
5	반포	동작대교 남단 상류	∘카페구조물 연결부 균열 ∘계단과 벽체사이 누수	∘균열보수 및 상부 방수
6	〃	동작대교 남단 하류	∘계단타일 탈락 및 계단 하부 균열	∘타일 및 균열 보수
7	여의도	국회의사당 연결	∘난간하부 콘크리트 신축이음 손상	∘신축이음 보수
8	〃	당산동-샛강	∘ 육교 하부타일 부분적 탈락	∘타일 탈락부 보수
9	〃	여의도 하류	∘교량접속시설 계단하부 콘크리트 탈락 및 철근 노출	∘철근 방청 및 탈락부 보수
10	망 원	양화대교 북단 계단	∘계단 전면 강재 부식	∘녹제거 및 녹막이 도장
11	〃	청암 보도육교	∘조류 배설물로 강재부식 진행	∘조류유입 방지망 설치
12	난 지	난지계단	∘계단 철판 부식	∘부식부 녹제거 및 도장

4		조치계획

○ 상기 지적사항 및 민원사항을 「2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)」 계약상대자에게 작업지시 하고 추후 정산 설계변경 하고자 함.

붙임 : 특별점검 결과 송부 및 정비일정 제출요청 1부.  끝.