“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약(준공기한 연기) 의뢰 _ 영향평가 용역

1. 공공개발기획단-6642호(2019. 7. 4.)와 관련입니다.

2. 우리 단에서 추진중인 과천대로일대 종합발전계획 수립 용역에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 과천대로일대 지구단위계획수립 관련

교통영향평가 및 전략환경영향평가 용역

나. 계 약 자 : ㈜동일기술공사

다. 용역기간

- 기존 : 2017.08.29. ~ 2019.07.19. (23개월)

- 변경 : 2017.08.29. ~ 2020.07.13. (35개월)

라. 계약금액 : 변경없음

마. 변경사유 : ********************

바. 예산과목 : 도시개발의 공공성 강화, 도시발전 및 공공개발, 과천대로일대 지구단위계획 수립 및 관련 영향 평가, 시설비

첨부   1. 준공기한 연기방침 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	공공개발기획단장
주무관	최희영		전략개발팀장	김원수		공공개발기획단장	07/05 이성창
협조자	계약1팀장	조현
시행	공공개발기획단-6706	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)