“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 아이돌봄포털 구축 용역 월간보고(6월)

1. 서울시 아이돌봄포털 구축 용역관련 6월간 추진실적을 아래와 같이 보고 드립니다.

가. 사업개요

1) 사업기간 : 2019.4.23. ~ 12.18.(8개월, 총 34주)

2) 수행업체 : ㈜제스아이앤씨

3)******************

나. 추진실적(6월, 10주차 포함)                ※ 회의일정 : 매주 화요일 15시

구분	6월 실적 (2019. 6. 1. ~ 6. 30.)				7월 계획
단계 진척	계획	29 %	실적	29 %	46 %
업무 내역					[사업관리] 1. 설계 감리 대응 (7.15. ~ 7.19) 1) 예비 조사 2) 현장 감리 3) 시정조치 2. 중간보고회 개최 (7.23 10시)
	[분석단계] 1. 요구사항 분석 1) 키움센터/열린육아방 인터뷰 - 중랑구 열린육아방(6.3.) - 도봉구 키움센터(6.4.) - 성동구 키움센터(6.5.) 2) 서면, 방문 인터뷰 자료 통합정리 2. 프로세스 분석 및 기능/기술 분석 1) 키움센터별 운영 프로세스 정리 - 대상 : 방문인터뷰 우리동네키움센터 2) 아이돌봄포털 예약 프로세스 초안 작성 - 상시, 수시 예약 프로세스 분리 및 표준화 3) 아이돌봄포털 예약 프로세스 회의 - 일시: 6.11 / 대상 : 아이돌봄정책팀 - 내용: 예약관련 결정사항 등 이슈정리 4) 아이돌봄포털 예약화면 프로토타입 작성 및 정책 협의 (6.27, 첨부) 5) 출결 프로세스 정리 - 출결 시스템 업체별 특장점 정리 - 등하원 출결 데이터 연동방식 결정 - 현재 키움센터에 도입된 출결관리제품 (프로웨어, ABM) 조사 및 연계여부 파악 6) RAW 데이터 수집 - 표준화를 위한 시설 정보 수집 7) 지역아동센터 인프라 연계 인터뷰(첨부) - 일시/대상 : 6.27. / 복지정책과 - 내용 : 사회복지정보시스템내 지역 아동센터 시설 자료 연계				[분석단계] 1. 프로세스 분석 및 기능/기술 분석 1) 출결시스템 업체 대상 사업설명회(7/3) 2) 아이돌봄포털 예약 프로세스 확정 3) 지도서비스 관련협의 - 공간정보담당관(공간정보플랫폼)
	[설계단계] 1. 화면 설계 1) UI/UX 화면 설계서(Front-End) - 돌봄지원 사업소개 화면(70%) - 키움센터 예약화면(80%) - 맞춤형 정보 서비스(50%) - 게시판 구성 (90%) - 마이페이지 (70%) 2. 정보 구조도 (IA) - 화면설계서 작업 중 상시 업데이트				[설계단계] 1. 화면 설계 1) UI/UX 화면 설계서(Front-End) - 사용자 화면 설계서 완료 - 사용자 화면 리뷰 2) 관리자화면 설계서(Back-End) - 관리자 화면설계서 프로토타입 완료 2. 정보 구조도 (IA) - 사용자 정보 구조도 완료 - 관리자 정보 구조도 완료
					[개발단계] 1. 화면 디자인 1) 사용자 화면 디자인 작업 2. 개발 착수 1) DB 구현(ERD 설계, 물리 DB 구축) 2) 사용자 UI 개발 작업 3) CMS 개발 작업
기 타	키움센터 예약관련 상세기준 결정필요 (아이돌봄정책팀/ 수시돌봄 신청횟수, 시간 단위 등) 사회복지정보시스템(지역아동센터) 자료 연계와 관련 복지부 별도 협의 진행중 프로젝트 일정 조율 필요 (WBS 수정 예정)

붙임   1. 월간업무 보고서(6월) 1부.

2. 주간업무 보고서(10주차) 1부.

3. 지역아동센터 인프라 연계 회의록 1부.

4. 키움센터 예약프로세스 정책협의 회의록 1부.

5. 월간회의 회의록 1부.  끝.

주무관	박지선		아이돌봄사업팀장	최미선		아이돌봄담당관	07/05 강지현
협조자
시행	아이돌봄담당관-8528	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-4817	/전송	02-2133-0733	/	happy_pjs@seoul.go.kr	/	부분공개(5)