문서번호	생태환경과-1521
결재일자	2019.7.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		생태환경과장	공원부장
김정화		최병언	07/08 代최병언
협 조

『경관조망지점 조성사업』설계변경 검토보고

2019. 7.

『경관조망지점 조성사업』설계변경 검토보고

한강 자연성 회복 기본계획에 의거 한강을 찾는 시민들에게 역사문화 체험기회를 제공하고자 시행 중인「경관조망지점 조성사업」에 대하여 현장여건에 따른 변경사항이 발생되어 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

▢ 사업개요

○ 공 사 명 : 경관조망지점 조성사업

○ 위    치 : 여의도․이촌한강공원

○ 공사내용 : 해설 설명판, 휴게시설 설치 등

○ 공사기간 : 2019. 5. 27. ~ 7. 15.

○ 도 급 비 : 금22,342,000원

○ 도 급 자 : 주식회사록담 대표 김지현

▢ 주요변경 내용

○ 목재데크기초 시공방법 변경에 따른 물량변경

※ 여의도구간 목재데크 디자인 조정

○ 현장여건 반영 및 식재구간 확대에 따른 조팝나무 규격 및 물량변경

▢ 설계변경 내용

구 분	변경사유 및 내용	비 고
시설물 공 사	○ 목재데크기초 시공방법 변경에 따른 물량 변경
	• 조망점A 목재데크(콘크리트타설→기초석 설치)
	▸터파기(기계:인력=9:1) : 15.42㎥ → 5.83㎥
	▸잔토처리(기계:인력=9:1) : 2.19㎥ → 0.71㎥
	▸되메우기(기계:인력=9:1) : 13.23㎥ → 5.12㎥
	▸콘크리트기초석(철근, 200×250×200) : 0개 → 71개
	▸레미콘타설(무근) : 0.94㎥ → 0㎥
	▸레미콘(25-18-8) : 0.92㎥ → 0㎥
	▸합판거푸집(6회) : 12.24㎡ → 0㎡
	▸THK강판(T=6.0) 0.11ton → 0ton
	▸STS셋트앙카(M12×100) : 143개 → 0개

구 분	변경사유 및 내용	비 고
시설물 공 사	• 조망점B 목재데크(콘크리트타설→기초석 설치)
	▸터파기(기계:인력=9:1) : 5.44㎥ → 5.83㎥
	▸잔토처리(기계:인력=9:1) : 0.77㎥ → 0.71㎥
	▸되메우기(기계:인력=9:1) : 4.67㎥ → 5.12㎥
	▸콘크리트기초석(철근, 200×250×200) : 0개 → 19개
	▸레미콘타설(무근) : 0.33㎥ → 0㎥
	▸레미콘(25-18-8) : 0.32㎥ → 0㎥
	▸합판거푸집(6회) : 4.32㎡ → 0㎡
	▸THK강판(T=6.0) 0.04ton → 0ton
	▸STS셋트앙카(M12×100) : 51개 → 0개
식 재 공 사	○ 현장여건 반영에 따른 조팝나무 규격 및 물량변경
	▸조팝나무(H0.8×W0.4) : 1,450주 → 0주
	▸조팝나무(H0.6×W0.3) : 0주 → 3,935주

▢ 설계변경 금액

○ ┏ 당   초 : 금22,342,000원

┗ 변   경 : 금29,195,100원(증6,853,100원)

(단위 : 원)

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
도급액	공급가액	20,310,910	26,541,000	6,230,090
	부가가치세	2,031,090	2,654,100	623,010
	계	22,342,000	29,195,100	6,853,100

○ 예산과목

- 한강공원이용 및 생태환경개선, 한강 자연성회복, 경관조망지점 조성, 시설비

▢ 조치계획

○ 위와 같이 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 설계변경내역 1부.

2. 제비율검증확인서 1부.  끝.