문서번호	행정지원과-14910
결재일자	2019.7.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리팀장	행정지원과장
방만천		엄태현	07/09 한병주
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수’

「청사 내진보강공사」실정보고서 검토보고

2019. 7.  .

서부수도사업소

【행정지원과】

「청사 내진보강공사」실정보고서 검토보고

「청사 내진보강공사」와 관련하여 시공사((주)대덕이엔지)로 부터 실정보고서가 접수되어 검토 후 보고 드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명:「서부수도사업소 청사 내진보강공사」

○ 공사기간: 2019. 4.18. ~ 7.16.

○ 공사내용: 벽식형 강재이력댐퍼 24개소 설치

○ 시공업체: ㈜대덕이엔지

□ 실정보고 현황

○ 보고내용: 공정회의시 오픈공간 댐퍼 마감부위 마감재료 변경에 따른 설계변경

○ 변경현황

(단위: 개소)

구분	계	도장마감	인테리어 필름 부착 마감	판넬마감	비고
당초	24	24	0	0
변경	24	14	8	2

□ 검토결과 및 조치계획

○ 검토결과: 오픈공간 댐퍼 마감을 인테리어필름 부착 마감하여 근무공간 이미지개선

○ 조치계획: 설계변경 자체(사업소)심사 후 설계변경 시행

- 시공사에서 실정보고 제출된 변경내역서 수정 후 재제출지시

- 설계변경 증액: 금1,553,800원

· 재료비 증액(4,754,790원), 제경비 감액(3,200,990원)

붙임  1. 실정보고서 1부.

2. 원가계산 검증확인서 1부.