문서번호	설비부-10453
결재일자	2019.7.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		여인웅	07/09 임정규
협 조

- 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사 -

관급자재 납품기한 연기검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 07.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사 -

관급자재 납품기한 연기 검토보고

우리 본부에서 추진 중인『중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사』에 소요되는 관급자재인 배전반 외 2종이 당초 계약된 납품기한으로 공정진행 상 반입이 불가하여 아래와 같이 연기 조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 함
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		관 련 근 거

**************************************

***************************

Ⅱ
		공 사 개 요

공 사 명 : 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사

공사위치 : 성동구 자동차시장3길 64번지 중랑물재생센터

공사내용 : 총인처리시설(412,000㎥/일)에 따른 전기공사 1식

공사기간 : 2017. 11. 24. ~ 2020. 1. 23.

도 급 비 : ********************************

도 급 자 : ***************

감 리 자 : *********

Ⅲ
		관급자재 납품기한 연기

관급자재 계약현황

연번	품 명	계 약 자	금 액	계약일자	납품기한
1	폐쇄형배전반	******	************	2018.11.22.	2019.07.28.
2	배전반	*****	**************	2018.06.01.	2019.10.31.
3	원방제어감시장치(계측)	****	**************	2018.07.06.	2019.10.31.

납품기한 연기

〇 연기사유

⇨ 2019년 7월 현재 토목공사 지하 구조물 설치 진행 중으로 2019년 12월 이후 총인처리시설 및 유입펌프장 전기실 내부에 해당 관급자재 반입 가능

○ 총인처리시설 A동 진행 현황	○ 총인처리시설 유입펌프동 진행 현황

〇 납품기한 연기

연번	품 명	계약자	계약금액	납품기한		비고
1	폐쇄형배전반	******	************	변경 전	2019.07.28.
				변경 후	2020.01.23.
2	배전반	*****	**************	변경 전	2019.10.31.
				변경 후	2020.01.23.
3	원방제어감시장치(계측)	****	**************	변경 전	2019.10.31.
				변경 후	2020.01.23.

〇 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

〇 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ
		조 치 계 획

건설사업관리단의 제출서류 검토 결과 선행공정 지연에 따른 관급자재 납품기한 연장이 필요하다고 판단되어 계약부서(총무부)에 동 계약 건에 대하여 납품기한을 2020년 1월 23일까지 연기 의뢰하고자 함

붙임 : *********************************************

*************************** 1부.       끝.