문서번호	토목부-12329
결재일자	2019.7.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이현국		여용석	07/09 김용제
협조
	열빛총괄과장		여인웅

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

예산 집행계획 변경 검토 보고

2019. 7.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

예산 집행계획 변경 검토 보고

토목공사(도로이설) 시행 전 저촉되는 문형식구조물 철거(이설)가 선행 되어야 하므로 원활한 공정관리를 위한 예산 집행계획 변경(설비부 통신공사 반영)에 대한 검토 보고임

Ⅰ		관 련 근 거

○ 재배정 예산 조정 요청【설비부-10140(‘19. 7. 4.)호】

○ 계약금액 조정 검토 보고【올대감 19-214(‘19. 7. 8.)호】

Ⅱ		사 업 개 요

○ 사 업 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

○ 공사위치 : 송파구 풍납동 일대

○ 사업규모

- 램프신설 : L=1,383m (교량 446m 포함)

- 램프이설 : L=1,309m (교량 139m 포함)

- 올림픽대로 이설 : 하남방향(L=1.21km), 김포방향(L=1.16km)

○ 사업기간 : 전체‘16. 4. 1. ~ ‘20. 3. 5. (4차 : ‘19. 1. 22. ~ ‘19. 12. 31.)

○ 총사업비 : 전체 49,592백만원 (‘19년 : 8,200백만원)

○ 감리사/시공사 : ㈜이산외 2개사 / ㈜덕일외 2개사

○ 공 정 율 : 58%

Ⅲ		검 토 내 용

○ 올림픽대로(하남방향) 이설 구간에 문형식구조물(통신 구조물)이 위치하고 있어 철거 및 이설이 선행되어야 하나 설계에 누락 되어있어 통신공사(설비부)에 반영하여 시행하고자 함

○ 원활한 공정관리를 위하여 금년도 토목공사에 대한 예산집행계획 변경이 불가피함

< 문형식구조물 현황사진 >

< ‘19년도 토목공사 예정공정표 >

○ 토목공사(4차) 도급금액을 조정하여 부족한 통신 공사비로 집행

- 예산재배정 변경 : (토목부) 감배정 27백만 원 → (설비부) 재배정 27백만 원

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
계		8,200,000,000	8,200,000,000	-
시설비	토목부	7,007,617,000	6,980,617,000	(감) -27,000,000
	설비부	516,383,000	543,383,000	(증) 27,000,000
감 리 비		676,000,000	676,000,000	-

Ⅳ		조 치 계 획

○ 상기와 같이 원활한 공정관리 및 효율적인 예산집행을 위하여 시설비를 조정하여 부족한 통신공사비로 집행하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

○ 토목공사 설계변경 반영

○ 도로계획과 예산 재배정 요청(토목부 → 설비부)

붙 임  1. 예산 조정 요청 공문(설비부) 1부.

2. 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.