문서번호	산지방재과-7388
결재일자	2019.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		사면총괄팀장	산지방재과장
임병관		김한준	07/09 장상규
협조

사방시설 완료지역(2014년 준공) 사방시설 점검용역 설계변경 요청에 따른 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7.  .

푸른도시국

(산지방재과)

사방시설 완료지역(2014년 준공) 사방시설 점검용역

설계변경 요청에 따른 검토보고

사방시설 완료지역(2014년 준공) 사방시설 점검용역 수행 중 “추가 과업   실정보고 승인건” 대한 설계변경 요청이 있어 이를 검토하고 보고 드림.

※ 관련근거 : 경기-278(2019.7.4.) 설계변경계약요청

사업개요

❍ 사 업 명 : 사방시설 완료지역(2014년 준공) 사방시설 점검용역

❍ 규     모 : 계류 점검(48개소),

❍ 사업기간 : 2019. 5. 21. ~ 2019. 7. 29.

❍ 용 역 사 : 사방협회 경기지부(회장 김남균)

❍ 용 역 비 : 9,500천원

보고 내용

❍ 관련근거

- 추가과업에 대한 검토 보고 승인(산지방재과-6734호,2019.6.25.)

⇒ 점검 개소수 당초 48개소를 → 57개소로 내역변경 승인

❍ 설계변경 금액

구 분	당 초	변 경	증 · 감
용역금액	9,500천원	10,460천원	증960천원
용역기간	‘19.5.21.~’19.7.29.	없음.	-

조치의견

❍ 위 설계변경 요청사항은 낙찰차액(증960천원)을 사용하여 설계변경 시행하여  과업수행에 만전을 기하고자 함.

붙임 1) 용역사 변경 요청 공문 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.  끝.