＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	노후밸브 정비 철저 및 점검계획 알림

1. 2019년도 노후밸브 정비실적 및 예산집행 현황을 아래와 같이 알려드리니 실적관리 및 예산집행에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 상반기 정비실적 및 예산집행 현황

① 정비실적, 예산집행 우수 : 동부

② 정비실적 양호(서부·북부·강서·강동), 예산집행 부진(북부)

③ 정비실적 부진(중부·남부·강남), 예산집행 부진(중부·서부·강서·남부·강남·강동)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비목표(개소)	3,200	560	260	510	135	500	410	555	270
정비실적	1,288	127	112	320	69	251	95	190	124
정비율(%)	40.3%	22.7	43.1	62.7	51.1	50.2	23.2	34.2	45.9
예산액(백만원)	22,564	4,266	2,019	2,522	1,183	3,752	3,130	3,866	1,826
집행액	5,355	864	470	1,526	378	933	519	314	351
집행률(%)	25.1%	20.3	23.3	60.5	32	24.9	16.6	8.1	19.2

2. 아울러 상반기 정비실적에 대한 점검계획과 실적 제고 및 관리계획을 아래와 같이 알려드리니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 점검일자 : 2019. 8월 중순(점검일자 별도 통보, 시설관리과 2개조 점검)

나. 요청사항 및 실적 제고를 위한 관리계획

1) 연간단가사업인 급수공사, 누수복구 업체 등 유기적 활용

2) 경영실적평가매뉴얼 개정 (예산집행 신속 부서 가점, 부진부서 감점 등)

3) 인세티브 및 패널티 부여

· 우수사업소 : 경영실적평가 가점, 표창 상신 추천

· 부진사업소 : 만회대책을 본부에 지참 보고(8월부터, 매월)
경영실적평가 감점 부과

4) 시설물 연간단가사업 발주시기 조정 (연초 1월 발주, 3월 착공)

붙임 1. 2019년 노후밸브 정비 추진실적 보고서 1부.

2. 노후 회주철 밸브 현황 1부(수도사업소별).  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수도사업소 급수운영과,시설관리과
주무관	성기옥		시설관리과장	유명은		시설안전부장	07/09 이규상
협조자
시행	시설관리과-6953	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1531	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개