시  민

문서번호	시설관리과-13272
보존기간	년
결재일자	2019.7.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관	주무관	시설관리과장
주세진	김성호	07/09 변재홍
협 조

설계변경 심의위원회 개최

【2018년 수유1동외 8개동 상수도공사 건설폐기물처리용역-1차최종】

2019. 7. 9.

북부수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의위원회 개최

우리사업소에서 시행중인『2018년 수유1동외 8개동 상수도공사 건설폐기물처리용역(장기계속)』에 대하여 처리물량이 변경됨에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의하고자 함.

1. 일 반 현 황

가. 용 역 명 : 2018년 수유1동외 8개동 상수도공사 건설폐기물 처리용역(장기계속)

나. 용역개요

- 당  초 : 폐기물운반   609㎥, 폐기물처리  1,209 톤

- 변  경 : 폐기물운반  238㎥ (감 371㎥), 폐기물처리  476 톤 (감 733톤)

다. 용역기간

- 2018.7.02. ~ 2019.7.31.

라. 용 역 비

- 당 초 : 43,709,000원

- 변 경 : 17,083,000원

바. 도 급 자 : 태성기초산업(주)  대표 윤영춘, 천보산업(주)  대표 전명우

2. 심의회 개최

가. 심의일정 : 2019년 7월 9일(화) 16:00

나. 심의장소 : 북부수도사업소 시설관리과

다. 위 원 장 : 시설6급 박미영

라. 심 의 자 : 시설6급 김성호, 시설7급 이한수, 시설7급 정성식

3. 심 의 내 용

○ 계약물량 감에 대한 설계변경 사항으로 단가계약 용역의 특성상 발생

가. 수량변동 및 단가적용의 적정성 여부

나. 계약변동 (감)수량 단가 낙찰률 적용범위내 적용 적정여부 등

4. 설계 금액 변경 내역

구 분	당초금액	변경금액	증·감액	비 고
총용역비	43,709,000	17,083,000	감)26,626,000
공급가액	39,735,455	15,530,000	감)24,205,455
부 가 세	3,973,545	1,553,000	감) 2,420,545

5. 설계변경에 따른 분담내역

당초, 변경

구 분	태성기초산업(주) (수집운반)	천보산업(주) (중간처리)	합 계	증·감액
공급가액	13,907,455	25,828,000	39,735,455	감)24,205,455
	6,070,000	9,460,000	15,530,000
부 가 세	1,390,745	2,582,800	3,973,545	감) 2,420,545
	607,000	946,000	1,553,000
도 급 액	15,298,200	28,410,800	43,709,000	감)26,626,000
	6,677,000	10,406,000	17,083,000

6. 항목별 수량 증·감에 따른 내역

항목	규격	단위	당초	변경	증·감	비 고
1. 폐기물운반
폐아스콘	24톤덤프트럭 (집하장∼처리장)	㎥	178	40	감)138
폐콘크리트	24톤덤프트럭 (집하장∼처리장)	㎥	97	70	감)27
폐 토 석	24톤덤프트럭 (집하장∼처리장)	㎥	334	128	감)206
2. 폐기물처리
폐아스콘	중간처리업체	톤	418	95	감)323
폐콘크리트	중간처리업체	톤	223	163	감)60
폐 토 석	중간처리업체	톤	568	218	감)350

6. 행 정 사 항

○ 위와 같이 설계변경 사항에 대하여 적법성 여부를 검토 및 심의하고

○ 심의 검토결과에 의거 설계변경 반영 조치코자 합니다.

첨 부 : 1. 설계변경 내역서 1부

2. 설계변경 합의서 1부

3. 설계변경 심의 신청서 1부.  끝.