문서번호	기반시설과-2055
결재일자	2019.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
박지수		代정창수	07/09 전영주
협 조

『2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)』

설계변경(1회) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한강사업본부

(시설부)

『2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)』

설계변경(1회) 계획 보고

「2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)」의 설계변경(1회) 시행 계획에 대하여 보고 드림.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2019. 4. 1. ~ 2019. 11. 30.

○ 계약금액 : 304,068천원

○ 계약상대자 : ㈜민정건설 대표 백승언

○ 공사규모

- 진·출입시설 보수 : 데크보수 620㎡, 조류방지망 설치 200㎡, 철재면 재도장 150㎡, 오일스텐재도장 440㎡ 등

- 천상의계단 보수 : 석재판 철거 후 재설치 138㎡, 도막식 방수 138㎡

2		설계변경 사항

○ 변경 사유 : 민원처리 및 공사현장 여건 등에 따른 신규공종 및 물량 증·감 사항 반영

○ 신규비목(우레탄 방수 외 23건) 협의율 93.372% 적용

- 관련근거 : 지방계약법 시행령 제74조 및 공사계약일반조건 제20조

· 신규비목의 단가는 설계단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위에서 계약당사자 간에 협의하여 결정

· 계약당사자 간에 협의가 이루어지지 않는 경우

⇒ [설계단가 + (설계단가 × 낙찰률)] × 50/100

- 신규비목에 대하여 설계단가 적용 요청(계약상대자 → 한강사업본부)

- 신규비목에 대하여 계약상대자와 발주청 간 이견으로 협의율(93.372%) 적용

⇒ [설계단가(100%) + 낙찰률(86.745%)] × 50/100 = 93.372%

○ 주요공종 수량 변경내역

공 종		단위	당초	변경	증·감
수량 변경	데크보수	㎡	620	270	감) 350
	오일스텐칠	㎡	440	1,480	증) 1,040
	석재판정비	㎡	32	168	증) 136
	안전난간 설치	m	30	88	증) 58
	핸드레일 설치	m	54	58	증) 4
	석재판 철거 후 재설치	㎡	138	117.7	증) 20.3
	도막식 방수(2회)	㎡	138	-	감) 138
신규 공종	방음판 설치	EA	-	3	증) 3
	사다리 안전등받이 설치	개소	-	4	증) 4
	풀림방지 너트 설치	EA	-	244	증) 244
	볼트캡 설치	EA	-	122	증) 122
	고재처리	㎏	-	32.4	증) 32.4
	시멘트 액체방수	㎡	-	40	증) 40
	우레탄 방수	㎡	-	117.7	증) 117.7

○ 직접공사비 변경 내역                                (단위:원)

공 종	수량	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	증,감
1. 한강공원 진입시설	1	식	62,242,863	81,075,705	9,576,037	152,894,605	증)	1,284,746
	1		59,217,752	71,291,064	23,670,535	154,179,351
1) 데크보수	1	식	55,318,796	58,083,396	435,860	113,838,052	감)	53,659,883
	1		33,987,867	25,993,322	196,980	60,178,169
2) 도장공	1	식	1,264,640	8,060,110		9,324,750	증)	10,576,844
	1		3,948,363	15,953,231		19,901,594
3) 기타보수	1	식	2,907,507	7,498,159	9,139,817	19,545,483	증)	44,367,785
	1		18,529,602	21,910,471	23,473,195	63,913,268
4) 조류방지 시설물	1	식	2,751,920	7,434,040	360	10,186,320		-
	1		2,751,920	7,434,040	360	10,186,320
2. 천상의계단	1	식	2,045,572	19,066,364	176,299	21,288,235	증)	1,447,779
	1		3,640,874	18,909,438	185,702	22,736,014
3. 기타 부대공	1	식	87,185	2,963,326	1,615,416	4,665,927	증)	2,067,796
	1		466,973	4,093,981	2,172,769	6,733,723
4. 폐기물 처리	1	식			3,222,369	3,222,369		-
	1				3,222,369	3,222,369

○ 총공사비 증·감 현황                                  (단위:원)

구 분		당초	변경	증·감
총공사비		305,148,000	305,148,000	-
도급비	공급가액	276,425,455	276,425,455	-
	부가가치세	27,642,545	27,642,545	-
	소계	304,068,000	304,068,000	-
이전비		1,080,000	1,080,000	-

3		조치계획

○ 상기와 같이 설계변경을 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함

붙 임 : 1. 변경 내역서(1회) 1부.

2. 설계변경 자문위원회 심의결과 1부.

3. 작업완료 보고서 및 협의율 요청 공문 각 1부(별첨).  끝.