문서번호	시설관리과-6925
결재일자	2019.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
성기옥		유명은	07/09 이규상
협 조

노후밸브 정비 추진실적 보고 (상반기)

2019. 7.

상수도사업본부

(시설관리과)

노후밸브 정비 추진실적 보고(상반기)

2019년 노후밸브 정비 추진에 따른 상반기 추진실적과 하반기 실적 제고를 위한 점검 및 관리방안을 보고 드림.

□‘19년 사업개요

❍ 정비목표 : 노후 밸브정비 3,200개소

❍ 예 산 액 : 27,480백만원                         (단위 : 개소)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목표	3,200	560	260	510	135	500	410	555	270

□ 상반기 추진실적 분석

❍ 전체적으로 상반기 목표달성은 완료하였으나 일부 사업소 저조

※ 상반기 정비실적 1,288개소 (목표 802개소)

① 정비실적 우수 : 동부

② 정비실적 양호 : 서부, 북부, 강서, 강남, 강동

③ 정비실적 부진 : 중부, 남부                          (단위 : 개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
총 계	3,200	560	260	510	135	500	410	555	270
1~2분기 (상반기 목표)	802	140	65	128	34	125	103	139	68
상반기 실적	1,288	127	112	320	69	251	95	190	124
정비율 (%)	40.3	22.7	43.1	62.7	51.1	50.2	23.2	34.2	45.9
3분기 목표	1,121	196	91	179	47	175	144	194	95
4분기 목표	1,277	224	104	203	54	200	163	222	107

❍ 상반기 정비율 40.3%에 비해 예산집행률은 25.1%로 저조

※ 기성금 지출이 상반기보다 하반기에 집중되는 사유로 예산집행률 저조

① 집행률 우수 : 동부

② 집행률 부진 : 서부, 북부, 강서, 강남, 강동

③ 집행률 불량 : 중부, 남부                          (단위 : 백만원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	자재센터	본부 (감리비)
예산현액	27,480	4,266	2,019	2,522	1,183	3,752	3,130	3,866	1,826	3,716	1,200
집행액	6,897	864	470	1,526	378	933	519	314	351	1,114	428
집행률(%)	25.1	20.3	23.3	60.5	32	24.9	16.6	8.1	19.2	30	35.7

□ 추진상의 문제점 (장애요인)

❍ 하반기 추경사업으로 추가 시행되는 노후관 정비공사에 역량 집중으로 시설물 연간단가사업 추진 어려움 예상

❍ 공사시 단수, 통수과정에서의 적수발생 우려로 밸브교체 기피

❍ 무단수차단공법시 전문가 자문 및 본부 사전승인 필요로 행정절차 준수 어려움 토로 (6월 사업소장회의에 건의사항으로 제출)

※ 관련근거 : 무단수차단공법 준수사항 이행(배수과-9311, ‘18.11.26)

- (닥타일주철관) 접합부 등에 대한 전문가 자문, 본부 승인 후 시행

- (강관) 신축관, 신축밸브실(밸브접합관 포함) 포함된 구간은 보강계획을 수립하여 기술사, 건설사업관리기술자 등 전문가 사전 검토 및 자문을 받아 시행

❍ 市 계약심사과의 발주시기 조정으로 시설물 연간단가사업 착공이 5월경(전년도·현년도 업체 변경 시기)으로서 상반기 집중시행 어려움

□ 목표달성을 위한 점검 및 관리방안

❍ 점검개요

- 점검목적 : 정비목표 달성과 ’19년 예산불용 최소화

- 점검대상

· 본부에 제출된 상반기까지의 정비실적과 현장과의 일치 여부

· 사업소 단위의 노후밸브 세부 목록을 근거로 정비 우선순위 검토(사업소 자체 부여방안)

· 재개발, 재건축 예정지역의 노후밸브 파악, 관리대상 정비물량 제외 추진
※ 사업승인 인가 단계부터

- 점검일자 : 2019. 8월 중순 (현장 상황에 따라 조정)

- 점 검 자 : 시설관리과 2개조 4명, 2인 1조

❍ 관리방안

- 연간단가사업인 급수공사, 누수복구와 연계하여 밸브교체 역량 집중

- 목표 대비 실적, 예산집행 매월 집중관리와 분기별 점검 실시
(필요시 추가 점검)

- 경영실적평가매뉴얼 개정 (예산집행 신속 부서 가점, 부진부서 감점 등)

- 인세티브 및 패널티 부여 추진

· 우수사업소 : 경영실적평가 가점, 표창 상신 추천

· 부진, 불량사업소 : 만회대책을 본부에 지참 보고(8월부터, 매월)
경영실적평가 감점 부과

- 무단수차단공법시 준수사항 완화 검토요청 (급수부 배수과)

· 일정구경 이상부터 적용 등(예, 400㎜ 이상)

· 단, 공사지점 6m 인근에 신축밸브실(관)이나 취약구간은 준수 등

- 시설물 연간단가사업 발주시기 조정 (연초 1월 발주, 3월 착공)

□ 행정사항

❍ 성과관리시스템에 노후밸브 정비 상반기실적 등록(‘19.7.12.까지)

❍ 점검, 관리방안을 통보 및 무단수차단공법 기준 변경 검토요청.

붙임 : 노후밸브 현황(세부 목록) 1부. 끝.