“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	시립북부장애인복지관 증축공사 실정보고 추가 요청사항 반영 등 검토 요청

1. 북장2019-3271(2019.7.8.) 및 3266(2019.7.8.)호와 관련입니다.

2. 3층 증축공사 중인 현재 평면변경시 미처 반영하지 못한 추가 사항에 대해 실정보고 및 공사회의시 결정사항에 대해, 2019년 1차 추경 등의 예산범위내에서 검토하시어 반영 여부 등을 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 요청사항

- 실외기 패드 증설(현 옥탑층) : 지하 1층에서 지상2층 실외기 패드 증설요구

- 램프 천정고 조정(현 2.4m) : 3m로 조정

- 엘리베이터 버튼 : 내부 좌우 설치 요구

나. 회신기한: 2019.7.15.(월)까지 공문으로 회신

붙임:  추가 요청사항 관련 공문 및 관련 자료 각 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
주무관	이유섭		장애인재가복지팀장	유정심		장애인자립지원과장	07/10 신수정
협조자
시행	장애인자립지원과-12772	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-7479	/전송	02-2133-0722	/		/	부분공개(5,6)