문서번호	행정지원과-15028
결재일자	2019.7.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리팀장	행정지원과장
방만천		엄태현	07/10 한병주
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수’

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

(서부수도사업소 청사 내진보강공사)

2019. 7.

서부수도사업소

【행정지원과】

□ 공사현황

○ 공 사 명: 「서부수도사업소 청사 내진보강공사」

○ 사업개요: 벽식형 강재이력댐퍼 24개소 설치

○ 공사기간: 2019. 4.18. ~ 7.16.

○ 공사금액: *************

○ 계약업체: *************

□ 설계변경내역

○ 설계변경사유: 마감공사 재질변경 시공에 따른 물량증감 및 신규공종 발생

○ 공사비 변경내역

(단위: 원)

구분	당초	변경	증·감	비고
가설공사	*********	*********	*
철거공사	**********	**********	*
Easy 댐퍼 설치공사	***********	***********	*
수장 및 도장공사	**********	**********	**********
폐기물처리공사	*********	*********	*
제경비	**********	**********	**********
부가세	**********	**********	*********
합 계	***********	***********	**********

○ 설계변경금액 변경내역

(단위: 원)

구분	당초	변경	증·감	비고
도급액	***********	***********	**********

□ 향후계획

○ 서부수도사업소 청사 내진보강공사 시공물량 증·감으로 인한 설계 변경된 사항을 자체 심의한 결과에 따라 계약상대자와 합의한 후 설계변경

및 변경계약.

붙임  1. 설계변경 심의위원회 개최 1부.

2. 설계변경 심의결과서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 검증확인서 1부.