“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 아이돌봄포털 구축 용역 주간보고(11주차)

1. 서울시 아이돌봄포털 구축 용역관련 주간 추진실적을 아래와 같이 보고 드립니다.

가. 사업개요

1) 사업기간 : 2019.4.23. ~ 12.18.(8개월, 총 34주)

2) 수행업체 : ㈜제스아이앤씨

3)******************

나. 추진실적(11주차)                        ※ 주간 회의일시 : 7.9.(화) 09시

구분	주간실적(2019. 7. 1 ~ 7. 5)				차주계획(2019. 7. 8 ~ 7. 12)
단계 진척	계획	31.0 %	실적	31.0 %	35.0 %
업무 내역	[사업관리] 1. 설계 감리 대응(7.15 ~ 7.19) 1) 설계 감리 준비 - 감리 요청문서 초안 작성				[사업관리] 1. 설계 감리 대응(7.15 ~ 7.19) 1) 감리문서 현행화 - 산출물 협의 및 설계 감리 산출물 작성 2) 감리 예비조사 미팅
	[분석단계] 1. 출결시스템 도입관련 사업설명회(7/3, 첨부) - 대상 : 8개 출결업체 - 내용 : 키움넷 연계방식 등 안내 연계 참여의사 피드백(~7/9)
	[설계단계] 1. 화면 설계 1) UI/UX 화면 설계(Front-End) - 화면설계서 초안 작업 - 내부 개발팀 리뷰(7/1) - 업무 담당자 리뷰(7/4, 첨부) 2) UI/UX 화면 설계(Back-End) - 메뉴 구조 작업(7/4) - 권한관리 설계(7/5) 3) 정보 구조도(IA) - 화면설계서 작업 중 상시 업데이트				[설계단계] 1. 화면 설계 1) UI/UX 화면 설계(Front-End) - 화면 ID 생성 및 현행화 2) UI/UX 화면 설계(Back-End) - 조직관리, 예약관리, 시스템운영관리, 사용자 관리, 게시판관리 3) 정보 구조도(IA) - 화면설계서 작업 중 상시 업데이트
					[구현단계] 1. 개발 착수 1) 개발 계획 수립 - 개발 정의서 작성 2) DB 설계 - ERD 작성 - 코드설계서 작성 - 도메인 정의서 작성 - 용어 정의서작성
기 타

붙임   1. 주간업무 보고서(11주차) 1부.

2. 출결시스템 사업설명회 회의록 1부.

3. 화면설계서(Front-End) 검토 회의록 1부.

4. 주간회의 회의록 1부.  끝.

주무관	박지선		아이돌봄사업팀장	이선희		아이돌봄담당관	07/10 강지현
협조자
시행	아이돌봄담당관-8787	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-4817	/전송	02-2133-0733	/	happy_pjs@seoul.go.kr	/	부분공개(5)