문서번호	교통운영과-12067
결재일자	2019.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	교통개선팀장	교통운영과장	보행친화기획관		도시교통실장
백바름	이유국	강진동	代박태주		07/10 황보연
협 조
	주무관			문예원

광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계 용역 시행계획

2019. 7

도 시 교 통 실

(교통운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계 용역 시행계획

광화문광장 조성 교통대책 업무가 이관됨에 따라 광장 주변 교차로 개선 등을 위한 기본 및 실시설계 용역 발주계획을 수립하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 추진배경

○ 도시교통실로 이관된 광화문광장 조성에 따른 교통대책 업무를 검토한 결과

광장 주변의 교통영향권(직·간접적)에 대한 세부 교통개선대책이 누락됨

○ 광화문광장 개선 종합기본계획, 광화문 교통대책위원회 및 종로구(주민설명회)에서 제시한 광장주변 교차로 및 생활도로 정비를 위한 과업 추가

○ 또한 광화문광장 조성공사 착공(’20. 1)에 맞춰 교통안전시설 심의 및 기본·실시설계를 ’19년 하반기에 완료, ’20년 1월에 개선공사 착수

□ 추진경위

○ 2019. 3.11.	광화문광장 교통대책 업무이관(도시재생실→도시교통실)

- 이관 : 교통영향평가·교통안전시설, 교통대책위원회 운영, 기본계획 교통대책 수립 등

○ 2019. 4.22.	광화문광장 주변 교통개선 설계 추진계획 수립

- 교통영향평가 과업변경 (광역적 차원의 교통대책 및 우회전략 등 과업내용 추가)

- 업무이관 시 누락된 세부 교통개선대책(기본·실시설계 용역) 계획 추가

○ 2019. 4.29.	기술용역 타당성심사 (결과 : 조건부 적정)

○ 2019. 6.27.	’19년 하반기 추경 편성(150백만원)

○ 2019. 7.1.~7.6	기본·실시설계 용역 사전규격 공개

Ⅱ		용역개요

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계

○ 과업기간 : 2019. 8 ~ 2020. 2

○ 용역목적

- 새로운 광화문광장 조성 계획에 따른 주변 간선·보조간선도로 및 생활권 도로의 기능 회복과 대체·우회 기능 확보 등

○ 용 역 비 : 금145,530천원 (’19년 하반기 추경 1.5억원 편성)

○ 용역규모 : 기본 및 실시설계 20개소, 모니터링 20개소

- 광화문광장 조성공사(정부서울청사교차로∼동십자각교차로, 광화문교차로∼세종대로사거리)를 제외한 광장 주변영향권 교차로 및 생활권 도로 대상

※ 주민설명회 및 광화문 교통대책위원회 요청사항에 따라 과업규모 조정

****

□ 과업범위

○ 교통량·신호운영·도로 기하구조 등 각종 현황 및 교통체계 문제점 조사

○ 차로·신호체계 개선, 교통안전시설 보완 등 개선안 마련

- 사업대상 지역의 교통문제 대응 방안 및 가로망체계 소통상 개선방안 작성

- 교통안전시설(노면·표지 등) 및 신호체계 개선(좌회전 신설, 유턴 허용 등)

○ 시경찰청 등 관계기관 교통안전시설 심의·협의, 주민설명회 개최

○ 실시설계 및 공사비 산출, 교통개선사업의 사업시행 지점 모니터링

□ 입찰 참가자격

******************************************************************************************

************************************************

***********************************************************************************

Ⅲ		향후계획

○ 2019. 7.11.	용역 공고

○ 2019. 8.	계약 및 착수

****************************************

****************

붙임  1. 과업내용서 및 입찰공고문 각 1부.

2. 사전규격공개 결과 및 설계내역서 각 1부