문서번호	소방행정과-18247
결재일자	2019.7.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
담당자	자산관리팀장	소방행정과장		소방재난본부장
김영민	박정경	이홍섭		07/11 이재열
협 조
	경리팀장		양철근

- 소방행정타운 2단계 전문훈련시설-

실화재훈련장 등 전문훈련시설 설치 계획

2019. 7.

소방행정과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

실화재훈련장 등 전문훈련시설 설치 계획

실화재 훈련장 등 비건축 부분에 대한 훈련시설 설치 공사 추진에    따른 자체발주 시행 계획 보고임

Ⅰ		추진근거

□『서울 소방행정타운 건설 기본 계획』시장방침 제282호(´12.9.12.)

□『2단계 전문훈련시설 건립사업 변경 계획』부시장방침 제135호(´17.6.5.)

□『전문훈련시설 공사 조기착공 검토보고』소방본부장 방침(´18.3.22.)

□『2단계 건축공사 발주 시행 계획』도시기반시설본부(´19.5.22.)

Ⅱ		사업 개요

□ 사 업 명: 소방행정타운 2단계 전문훈련시설 건립

<훈련시설별 추진내역>

시설명	건 축 분 야		비건축분야
	지하복합건물훈련, 종합운동장	시민지원동,목조, 붕괴,어린이집	실화재,차량화재, 위험물,화재시뮬
추진방식	1단계 포함	신규	신규
발주부서	도기본	도기본	소방본부
추진현황	현공정률 95%	’19.5월 발주	발주계획 수립

□ 사업내역 : 전문훈련시설 4종(실화재,차량화재,위험물 훈련장,화재시뮬레이터)

□ 사업기간 : 2019.7 ~2019.12

□ 사 업 비 : *******

Ⅲ		추진 경위

○ 2018.02.05 : 소방행정타운 2단계 공사 사업의뢰(도기본)

○ 2018.03.22 : 전문훈련시설 공사 조기착공 검토보고

○ 2018.07.31 : 1단계 공사 완료 → 특구단 입주(8.28)→ 소방학교 입주(10.1)

○ 2018.10. 1 : 지하(철)복합건물 훈련장 공사 착수

○ 2018.12.30 : 2단계 2차공사 설계 완료

- 시민지원동, 목조훈련장, 붕괴훈련장, 어린이집, 2단계 부지 토목

※ 실·화재, 차량화재, 위험물훈련장은 비 건축물로 설계 제외

○ 2019.05월  : 훈련시설 발주부서 협의 결정(도기본→소방본부)

○ 2019.06.20 : 2단계 건축분야 4개시설 공사 착공(도기본 발주)

Ⅳ		자체 발주 사유

○ (도시기반시설본부) 실화재, 차량, 위험물 훈련시설은 비건축 분야로 전문성이 있는 소방재난본부에서 발주요청

○ (소방재난본부) 비건축 훈련시설은 설계도서 작성이 곤란함에 따라 협상에 의한 계약으로 추진하는 것이 타당할 것으로 판단됨에 따라 소방재난본부 자체 발주 추진

Ⅴ		발주시행 계획

○ 사 업 명 : 실화재 훈련장 등 전문훈련시설 제작 설치

○ 세부내역

실화재훈련장	차량화재훈련장	위험물훈련장	화재시뮬레이터
연소동 및 집진동	승용차량 2대 (실내 및 옥외)	주유화재 및 플랜트 시설	화재연출(가상) 시뮬레이터

○ 계약방법 : *****************************

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조

- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규)

○ 설치범위 : 훈련시설 제작 및 현장 설치

○ 소요예산 :************(총액 입찰예산)

○ 준공기한 : 착수일로부터 110일

○ 예산과목 : 소방행정기반강화/직무한경개선/행정타운건립/시설비

Ⅵ		향후 추진계획

○ 계약 사전절차 : 7월중(계약심사, 일상감사, 사전규격공고)

○ 제안서 평가 위원 선정 : 7월중

○ 입찰공고 : 8월중(10일)

○ 제안서 접수 및 심의 : 8월말

○ 계약자 선정 및 계약체결 : 8월말(서울시 재무과)

○ 착공 및 준공 : 9월~12월(훈련장 설치 공사)

붙임  1. 실화재훈련장 등 제안요청서(표준안) 1부.

2. 배치계획도 및 부지조성 사진 1부.  끝.

[ 2단계 전문훈련시설 배치 계획도 ]

종합운동장

지하(철)복합건물

실화재 대응

붕괴•도시탐색

위험물 훈련장

차량사고

목조문화재

시민지원동

[ 전문훈련시설 부지 조성 사진]