문서번호	도로보수과-4605
결재일자	2019.7.11.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

				시 민
주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
박해웅	양기승	07/11 송만규
협 조

2019년 도로굴착복구 시행도로 정비공사

코아천공에 따른 세부 추진계획 보고

2018. 7.

동부도로사업소

(도로보수과)

2019년 굴착복구 시행도로 정비공사

코아천공에 따른 세부 추진계획 보고

『2019년 굴착복구 시행도로 정비공사』 대상 구간의 코아천공 및 육안조사를 시행하고 세부 추진계획을 수립하여 보고드림.

	1		관련 근거

❍ 코아채취 검토결과 제출 지시[도로보수과-2612호(2019.04.18)]

❍ 코아채취 검토결과 제출[장백19-407호(2019.04.29)]

❍ 코아채취 검토결과 보고[도로굴착(1권역)-22호(2019.05.03)]

❍ 코아채취 검토결과 제출[장백19-407호(2019.05.29)호]

❍ 코아채취 검토결과 추가 보고[도로굴착(1권역)-74호(2019.06.26)호]

	2		공사 개요

❍ 공 사 명 : 2019년 굴착복구 시행도로 정비공사

❍ 공사기간 : 2019.3.19. ~ 2019.9.30.

❍ 시 공 자 : 장백이앤씨(주) 김지수

❍ 공 사 비 : 540,089천원(도급 219,199. 관급 310,890. 이설 10,000)

	3		보고 내용

❍ 코아채취 수량 변경

- 당초 : 굴착연장 100m당 1개소, 총 25개소를 채취하였으나 코아채취 결과 아스콘 포장두께가 15cm 내외가 다수 발견됨

- 변경 : 포장두께 부족구간 주변의 포장두께 정밀조사를 위해 14개소 추가 채취(위치 및 결과 : 붙임 참조)

	4		건설사업관리자 검토 결과

❍ 균열깊이 및 육안조사 검토 결과에 따른 포장두께(절삭깊이) 산정

공사구간 (시점~종점)	방향	폭 (m)	연장 (m)	면적 (a)	평균포장 두께(cm)	균열평균깊이(cm)	당초절삭 포장두께	적용포장 두께	비고
송파구청사거리 ~ 잠실전화국삼거리	상.하행	23.7~25.5	151.3	38.71	19.8	9.6	t=10cm	t=10cm	적정
잠실전화국삼거리 ~ KT앞삼거리	상.하행	12.0~21.6	46.4	9.23	20.5	5.0	t=5cm	t=5cm	적정
KT앞삼거리~ 잠실전화국삼거리	하행	14.0	160.0	22.4	21	5.0	t=5cm	t=5cm	적정
방이삼거리내	하행	13.7~28.4	31.4	6.79	26	10.0	t=5cm	t=5cm	적정
방이삼거리~ 화인빌리지앞	상하행	20.0	205.0	41.0	16.8	2.0	t=5cm	t=5cm	적정
화인빌리지앞 ~ 방이사거리	상하행	19.8~23.9	121.0	27.64	19.8	2.8	t=10cm	t=5cm	균열깊이 부적격
방이사거리 ~ 포레스트요양병원	하행	10.7	70.0	7.49	17.5	6.0	t=10cm	t=10cm
방이사거리 ~ 포레스트요양병원	상행	9.1	70.0	6.37	15.0	4.3	t=10cm	t=20cm	포장두께 부족
포레스트요양 병원~이브자리	상하행	19.8~23.8	258.3	53.20	16.7	4.7	t=5cm	t=5cm	적정
이브자리 ~ 백제고분군사거리	하행	13.0	72.5	9.46	15.0	3.5	t=10cm	t=20cm	포장두께 부족
이브자리 ~ 백제고분군사거리	상행	6.0~10.0	65.9	4.82	25	4	t=5cm	t=5cm	적정
백제고군분사거리	상하행	24~34.1	11.5	3.34	15	5	t=5cm	t=5cm	적정

❍ 공사비 증감 : 28백만원 증

	4		검토결과 및 세부 추진계획

❍ 추가 검토내용

- 건설사업관리자 검토의견에 따르면 방이사거리 ~ 백제고분군사거리간약 400m 구간의 3개차로(상·하행 1차로 및 좌회전차로)의 포장두께가 부족(12㎝~17㎝)하여 포장도로의 공용성 및 내구성 확보가 어렵고

- 일부구간은 균열깊이보다 포장두께가 부족하여 내구성이 결여됨

❍ 추가 검토결과

- 방이사거리 ~ 백제고분고분군사거리(약 400m 구간)

ㆍ총 7차로중 상·하행 끝차로의 포장두께부족 구간은 전체 포장(t=15~17cm)을 절삭 후 t=20cm로 재포장 시행(상행 200m, 하행 200m),

ㆍ나머지 차로는 폐기물처리비 및 자재비등의 예산절감(2.5억)을 위해 횡단구배를 조정(표층높이 인상)하는 공법으로 공사시행(t=5cm 절삭 후 t=5cm ~ 10cm 재포장)

- 나머지 구간(송파구청사거리~방이사거리, 약 1,000m 구간)

ㆍ표층 5cm만 절삭후 재포장 시행하고 균열깊이가 5cm를 초과하는 구간은 균열부 주변만 부분보수 시행하여 공용성 및 내구성 확보

ㆍ부분보수 방법 : 폭 2.0m, t=5cm 추가절삭 후 재포장(BB-2)

❍ 세부 추진 계획

공사구간 (시점~종점)	방향	폭 (m)	연장 (m)	면적 (a)	평균포장 두께(cm)	균열평균깊이(cm)	당초 절삭및포장두께	변경 절삭및포장두께	비 고
송파구청사거리 ~ 잠실전화국삼거리	상.하행	23.7~25.5	151.3	38.71	19.8	9.6	t=10㎝ →t=10㎝	t=5㎝ →t=5㎝	균열깊이가 5㎝이상 구간은 부분보수 시행
잠실전화국삼거리 ~ KT앞삼거리	상.하행	12.0~21.6	46.4	9.23	20.5	5.0	t=5㎝ →t=5㎝	t=5㎝ →t=5㎝	적정
KT앞삼거리~ 잠실전화국삼거리	하행	14.0	160.0	22.4	21	5.0	t=5㎝ →t=5㎝	t=5㎝ →t=5㎝	적정
방이삼거리내	하행	13.7~28.4	31.4	6.79	26	10.0	t=5㎝ →t=5㎝	t=5㎝	균열깊이가 5㎝이상 구간은 부분보수 시행
방이삼거리~ 화인빌리지앞	상하행	20.0	205.0	41.0	16.8	2.0	t=5㎝ →t=5㎝	t=5㎝	적정
화인빌리지앞 ~ 방이사거리	상하행	19.8~23.9	121.0	27.64	19.8	2.8	t=10㎝ →t=10㎝	t=5㎝	균열깊이에 따른 포장두께 재산정
방이사거리 ~ 포레스트요양병원	하행	10.7	70.0	7.49	17.5	6.0	t=10㎝ →t=10㎝	차로별로 포장두께 조정 (붙임참조)	ㆍ전구간 포장두께 확보 ㆍ횡단구배 조정을 위해 2018년시행 포장구간 추가정비 (A=14a)
방이사거리 ~ 포레스트요양병원	상행	9.1	70.0	6.37	15.0	4.3	t=10㎝ →t=10㎝
포레스트요양 병원~이브자리	상하행	19.8~23.8	258.3	53.20	16.7	4.7	t=5㎝ →t=5㎝
이브자리 ~ 백제고분군사거리	하행	13.0	72.5	9.46	15.0	3.5	t=10㎝ →t=10㎝
이브자리 ~ 백제고분군사거리	상행	6.0~10.0	65.9	4.82	25	4	t=5㎝ →t=5㎝
백제고군분사거리	상하행	24~34.1	11.5	3.34	15	5	t=5㎝ →t=5㎝

❍ 공사규모 및 공사비 증·감 내역(개략)

구 분	공 사 규 모		공 사 비(천원)			비 고
	당 초	변 경	당 초	변 경	증·감
합 계			540,090	572,690	증 32,600
도급비	절삭후재포장 (t=5~20㎝) A = 229a	절삭후재포장 (t=5~20㎝) A=236a	219,200	232,390	증 13,190
관급비			310,890	340,300	증 29,410
이설비			10,000	0	감 10,000

❍ 소요예산 : 부족공사비(32,600천원)은 당해 공사의 낙찰차액 활용

[ 낙찰차액 현황 ]

구 분	발 주 액	계 약 액	낙찰차액	비 고
계	509,755,200	477,129,740	32,625,460
2019 시행도로 정비공사 (도급비)	247,110,000	219,199,500	27,910,500
2019 시행도로 정비공사 관급자재(1등급 아스콘)	262,645,200	257,930,240	4,714,960

❍ 공사일정 : 아스팔트콘리트 선정시험(7.12. 완료) 결과에 따라 9월까지

공사 완료

	5		행정사항

❍ 당해 건설사업관리자에게 코아천공 결과를 반영, 절삭 및 포장두께를 조정(변경)하여 공사추진토록 하고 공사계획 변경에 따른 공사비 증가분은 향후 설계변경 시 반영하여 정산처리토록 지시코자 함.

붙임 : 1. 건설사업관리자 검토의견서 1부.

2. 코아천공 결과 및 위치도 1부.

3. 공사 종·평면도 1부.

4. 개략(변경)공사비 산출서 1부.  끝