＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(1차-최종) 시행(서부수도사업소 청사 내진보강공사)

우리사업소에서 시행중인 『서부수도사업소 청사 내진보강공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약코자 합니다.

가. 공 사 명: 서부수도사업소 청사 내진보강공사

나. 사업개요: 벽식형 강재이력댐퍼 24개소 설치

다. 공사기간: 2019.04.18. ~ 2019.07.16.

라. 계약업체: *************

마. 설계변경 사유: 마감공사 재질변경 시공에 따른 물량증감 및 신규공종 발생

1) 주요공종 공사비 변경 내용

(단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증․감
가설공사	*********	*********	*
철거공사	**********	**********	*
Easy 댐퍼 설치공사	***********	***********	*
수장 및 도장공사	**********	**********	**********
폐기물처리공사	*********	*********	*
제경비	**********	**********	**********
부가세 등	**********	**********	*********
합 계	***********	***********	**********

2) 계약금액 변경(조정) 내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
도급액	***********	***********	**********

바. 예산 과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 건물, 서비스장비 확충 및 환경개선사업, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 심의결과 보고서 1부.

2. 설계변경 심의 결과서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 검증확인서 1부.

5. 합의서 1부.  끝.

★주무관	방만천		행정관리팀장	엄태현		행정지원과장	한병주		서부수도사업소장	07/11 박영헌
협조자	주무관	구준모
시행	행정지원과-15068	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02)3146-3519	/전송	02)3146-3578	/	pico1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)