문서번호	시설보수과-6062
결재일자	2019.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	07/11 박문희
협 조
	주무관			윤동원
	주무관			강연홍
	주무관			김규춘

- '19년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개) - 작업완료 보고(제1,2,4,5차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(시설보수과)

‘19년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개) 작업완료 보고

(제1,2,4,5차)

‘19년 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가/터널,지하차도,복개)와 관련, 작업지시 후 작업완료(제출)된 내역에 대하여 현장확인하고 그 결과를 보고 드림

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2019년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개-강서)

나. 공사기간 : 2019. 3. 5 ~ 12. 20

다. 계약금액 : 803,758천원

라. 공사개요 : 포장보수 A=20a, 교면방수 A=1,700㎡ 신축이음보수

L=105m, 기타 1식

마. 계 약 자 : 레오개발(주) 대표 양공진

2. 보고내용

가. 작업지시 및 완료

차수	근거	작업지시	작업기간	작업완료	비고
1차	시설보수과-2750	2019. 4. 1	2019. 3.29.~ 4.20	2019. 4.19
2차	시설보수과-3898	2019. 5. 7	2019. 5. 8.~ 6.20	2019. 6.19
4차	시설보수과-4812	2019. 6. 4	2019. 6. 4.~ 8.30	2019. 7. 9
5차	시설보수과-5291	2019. 6.18	2019. 6.25 ~7.31	2019. 7. 5

나. 작업지시 및 완료내용

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
1차	1	가마산지하차도	지하차도양 방향 배수로	배수로 퇴적물 청소	167.4㎡	배수로 퇴적물 청소	167.4㎡	주간
	2	개화지하차도			21.6㎡		30.6㎡	주간

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
1차	3	서부트럭터미널앞 지하차도	지하차도양 방향 배수로	배수로 퇴적물 청소	6.4㎡	배수로 퇴적물 청소	24.0㎡	주간
	4	고척2지하차도			108.6㎡		151.2㎡	주간
	5	공항입구지하차도			9.9㎡		9.9㎡	주간
	6	국회앞지하차도			38.4㎡		47.4㎡	주간
	7	구로역지하차도			86.1㎡		108.6㎡	주간
	8	노들길지하차도			43.5㎡		66.0㎡	야간
	9	목동교서측 지하차도			20.4㎡		20.4㎡	주간
	10	여의2지하차도			78.0㎡		80.0㎡	야간
	11	오금지하차도			33.0㎡		49.5㎡	주간
	12	오목교서측 지하차도			30.0㎡		30.0㎡	주간
	13	오목지하차도			48.0㎡		83.0㎡	주간
	14	외발산지하차도			100.5㎡		115.5㎡	주간
	15	등촌지하차도			61.2㎡		123.4㎡	주간
	16	개봉지하차도			145.8㎡		172.5㎡	주간
	17	폐기물 운반	2.5ton덤프트럭,중간적치장,주간	토사	5.99㎥	토사	5.67㎥	주간
							0.73㎥	야간
				낙엽및기타이물질	53.94㎥	낙엽및기타이물질	51.00㎥	주간
							6.57㎥	야간
	18	부대공	도로시설물 16개소	일일노무	8.0일	일일노무	7.0일	주간
							1.0일	야간
	19			교통정리원	8.0인	교통정리원	7.0인	주간
							1.0인	야간
	20			싸인보드	64.0hr	싸인보드	56.0hr	주간
							8.0hr	야간
	21			안전시설비	480.0m	안전시설비	480.0m	주간
2차	1	고척2지하차도	안양방면 지하차도 종점부	중앙분리대 단부파손보수	1.0개소	중앙분리대 단부파손보수	1.0개소	주간
	2	서울교접속지하차도	지하차도내부	유도배수판 파손보수	9.2m	유도배수판 파손보수	9.2m	주간
	3			물끊기공 설치	35.0m	물끊기공 설치	35.0m	주간
	4	오목교서측 지하차도	안양방면 종점부	중앙기둥 마감재 탈락	0.59㎡	중앙기둥 마감재 탈락	0.59㎡	주간
	5	신도림지하차도	미래초교 → 거리공원입구교차로방면	배수로그레이팅 파손보수	1.0m	배수로그레이팅 파손보수	1.0m	주간
	6		지하차도 양방향 출구부	조형물 폴리카보네이트 정비	1식	조형물 폴리카보네이트 정비	1식	주간
	7	구로역지하차도	쌍용자동차→구로역교차로방면	보행로 화강석 들뜸보수	0.2㎥	보행로 화강석 들뜸보수	0.2㎥	주간
	8		AK백화점→구로역교차로방면	조립식과속방지턱설치	2.2m	조립식과속방지턱설치	2.2m	주간
	9			도로반사경설치	1.0개소	도로반사경설치	1.0개소	주간
	10			교통안전표지판설치	1.0개소	교통안전표지판설치	1.0개소	주간
	11	도림천(좌안) 복개	복개 종점부 오거리	코어천공	1.0개소	코어천공	1.0개소	주간
	12			쏠라2구경고등(24시간용)	1.0개소	쏠라2구경고등(24시간용)	1.0개소	주간
	13		대림역→구로디지탈단지역	신축이음파손보수	28.0m	신축이음파손보수	28.0m	야간

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
2차	14	도림천하류복개	교대(우안)옹벽부	콘크리트 표면보수	2.16㎡	콘크리트 표면보수	2.16㎡	주간
	15	오목교동측 지하보차도	지하차도내부	교통표지판 교체	1.0개소	교통표지판 교체	1.0개소	주간
	16	개봉지하차도	지하차도 양방향	방음판 파손교체	20.0개소	방음판 파손교체	20.0개소	야간
	17	범벅터널	서울→부천방면 입구	보행금지용 휀스설치	2.0경간	보행금지용 휀스설치	2.0경간	주간
	18	부대공	트럭탑재형 크레인	5ton,주간	2.0일	5ton,주간	2.0일	주간
	19		일일노무	야간,청소,정리, 단순작업	4.0일	야간,청소,정리, 단순작업	4.0일	야간
	20		교통정리원	주간	7.25일	주간	7.25일	주간
	21			야간	6.0일	야간	6.0일	야간
	22		싸인보드	주간	54.0hr	주간	54.0hr	주간
	23			야간	48.0hr	야간	48.0hr	야간
	24		안전시설비	조인트공사,도면참조	470.0m	조인트공사,도면참조	470.0m	주,야간
4차	1	목동교서측 지하차도	안양 ↔ 성산대교 양방향	콘크리트 균열보수	48.4m	콘크리트 균열보수	48.4m	야간
	2			콘크리트 단면보수	1.73㎡	콘크리트 단면보수	1.23㎡	야간
	3			콘크리트 표면보수	1407.7㎡	콘크리트 표면보수	1208.9㎡	야간
	4	고척2지하차도	목동 → 광명방향 종점부	콘크리트 표면보수	119.0㎡	콘크리트 표면보수	119.0㎡	야간
	5	부대공	트럭탑재형 크레인	5ton,주,야간	12.0일	5ton,주,야간	12.0일	야간
	6		공사 홍보물	안내간판(초고휘도)	5.0개	안내간판(초고휘도)	5.0개	야간
	7		일일노무	청소,정리,단순작업 (주,야간)	5.0일	청소,정리,단순작업 (주,야간)	5.0일	야간
	8		교통정리원	주,야간	22.0일	주,야간	22.0일	야간
	9		싸인보드	주,야간	192.0hr	주,야간	192.0hr	야간
	10		안전시설비	도면참조	300.0m	도면참조	300.0m	야간
5차	1	구로지하차도	영등포 → 고척교방면	아스팔트 절단	107.0m	아스팔트 절단	107.0m	야간
	2			아스팔트 포장 깨기	0.75㎥	아스팔트 포장 깨기	0.75㎥	야간
	3			초속경 콘크리트 타설	1.32㎥	초속경 콘크리트 타설	1.32㎥	야간
	4			스틸그레이팅 인상	377.0m	스틸그레이팅 인상	377.0m	야간
	5			배수로 퇴적물 청소	59.4㎡	배수로 퇴적물 청소	59.4㎡	야간
	6			폐기물 운반	3.72㎥	폐기물 운반	3.72㎥	야간
	7			그레이팅파손 및 유실	7.0개소	그레이팅파손 및 유실	7.0개소	야간
	8	부대공	일일노무	야간,청소,정리, 단순작업	5.0일	야간,청소,정리, 단순작업	5.0일	야간
	9		교통정리원	야간	5.0인	야간	5.0인	야간
	10		싸인보드	야간	80.0hr	야간	80.0hr	야간
	11		안전시설비	도면 참조	397.0m	도면 참조	397.0m	야간

다. 작업완료 검수사진(계측)

구로역 배수로 퇴적물 청소완료 검수사진(1차 작업지시)	여의2지하차도 배수로 퇴적물 청소완료 검수사진(1차 작업지시)	서울교접속지하차도 물끊기 설치 완료 검수사진(2차 작업지시)
개봉지하차도 방음판 보수완료 검수사진(2차 작업지시)	목동교서측지하보차도 표면보수 완료 검수사진(4차 작업지시)	구로지하차도 배수로 정비완료 검수사진(5차 작업지시)

라. 주요 변경사항 : 경미한 물량 증감

마. 개략공사비 : 431,014천원(세부내역 별첨)

3. 검토의견

- 작업지시 내용과 같이 이상없이 작업완료 되었음을 현장확인 하였는 바, 추후 설계변경시 정산 반영처리코자 함

별첨 : 1) 시공사 작업완료보고서 1부(별첨)

2) 작업완료 보수사진 1부(별첨). 끝.