문서번호	시설개선과-6411
결재일자	2019.7.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이준모		황인정	07/11 윤정한
협 조
	운영기획과장			김남대

『잠실종합운동장 화장실 노후 기계설비 교체공사』

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

『잠실종합운동장 화장실 노후 기계설비 교체공사』

설계변경 검토보고

『잠실종합운동장 화장실 노후 기계설비 교체공사』시행 중 계약업체로부터 실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 설계변경 하고자 함.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 잠실종합운동장 화장실 노후 기계설비 교체공사

***************

*********************

******************************

○ 사업내용

- 화장실 노후 위생설비 및 환풍기 교체

- 기타 부대공사 1식

Ⅱ		설계변경내용

□ 설계변경사유

○ 계약업체 실정보고에 따른 물량 증가

- 현장조사 결과 양변기, 환풍기 등 상태 불량한 설비가 추가 발견됨

□ 계약금액 변경

변 경 전	변 경 후	증·감
************	************	***********

※ 계약금액 증가액은 본사업 집행잔액 사용

- 예산과목 : 2019년 제100회 전국체전대비 시설개선(시설비)

□ 주요 변경내용

공종	설계변경 내용	증‧감액
***********	**************** ****************	********
******	***********	******
******	*************	******
******	************* *************	******
**********	*************	******
***		********
**		********

□ 검토의견

○ 위 변경사항을 반영하여 설계변경을 시행하고자 함.

붙  임 : 1. 실정보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부

3. 계약금액 검증확인서 1부. 끝