문서번호	기전과-4093
결재일자	2019.7.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
김용문		07/11 임태수
협 조

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)』

제2차(추가1) 작업지시 계획 보고

2019.  7.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)』

제2차(추가1) 작업지시 계획 보고

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)』관련 제2차(추가1) 작업지시를 아래와 같이 시행하여 교통안전표지 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 교통안전표지 현황                              <2019년, T-gis자료>

구 분	합계	주의	규제	지시	보조	대형	기타
안전표지	12,807	955	4,503	2,727	3,842	23	757

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)

○ 공사장소 : 남부도로사업소 관내(동작, 관악, 금천, 서초, 영등포 일부)

○ 공사내용 : 교통안전표지 신설(서울지방경찰청 규제) 및 일상 유지보수

○ 계 약 자 : ***************

- 계약기간 : 2019. 2. 22. ~ 2019. 12. 27.

- 계약금액 : ************

○ 감리업체 : ************

□ 그간의 추진사항

○ 2019.3.12 : 제1차 작업지시 - 13건

○ 2019.4.05 : 제1차 작업지시(추가1) - 21건

○ 2019.5.13 : 제1차 작업지시(추가2) - 6건

○ 2019.5.31 : 제1차 작업완료 보고(감리)

- 작업기간 : 2019. 3. 12 ~ 5. 31(금)

- 작업내용 및 결과 : 총 40건(규제 35건, 일상유지 5건)

▷ 규제사항 : 35건(완료 30건, 미완료 5건)

▷ 일상유지 : 5건(완료 5건, 미완료 0건)

※ 1차작업 미완료 5건에 대하여는 현장여건(신호기, 노면작업)이 조성되면 작업 실시토록 함

○ 2019.6.10 : 제2차 작업지시 - 12건

- 작업기간 : 2019. 6. 11 ~ 8. 30(작업진행 중)

□ 금회 작업지시 사항

○ 작업지시 차수 : 제2차(추가1)

○ 작업기간 : 2019.6.11. ∼ 2019.8.30.(금).

○ 금회 작업대상 : 총 30건(규제 9건, 일상유지 21건)

<주요작업내용>

연번	위 치	작 업 내 용	작업근거	비고
1	관악구 봉천동 1693-39 (낙성대역3,6번출구중앙화단)	충돌방지+보조표지-----1조(교체) (부착대포함)	민원(파손)
2	동작구 사당동 1129 (남부순환로까지고개)	#311(유턴)+보조-------2조(신설) #226(천천히) ------- 1(철거)	교통운영과-9662 2019.6.04
3	관악구 신림동 1642-9 (청암두산위브센트움 주변)	#216,#132,#324 등 -----1식 #219(주차)+428(견인)---1(이설)	교통운영과-9662 2019.6.04
4	관악구 신림동 산199-1 (난곡터널 부근)	#138(터널)+보조--------1(신설) --기존표지파손철거상태	자체순찰
5	서초구 효령로 84앞 (효령아파트앞 정류소부근)	테이퍼폴지주및표지-----1(교체) --지주하부부식	자체순찰
6	금천구 디지털로 154 (롯데택배 정문 앞)	지주파손--------지주교체 (주차금지,견인지역표지재사용)	자체순찰
7	서초구 예술의전당 앞 교차로	보조표지 --- 표지교체 (적신호시⇒적신호시/좌회전신호시)	서초서 교통과-6392 2019.6.21.
8	서초구 반포동 128-4 (반포교차로, 고가차도 하부측)	#216(유턴금지) ------ 1(신설)	서초서 교통과-6392 2019.6.21.
9	서초구 서초동 1748-38 (서울남부터미널 앞)	테이퍼폴지주철거------1(철거) #224(속도,60) --------1(이설)	교통관리과-16217 2019.6.28
10	동작구 신대방동699-4 (신라스테이호텔 앞)	주정차금지+보조 ---- 1조(신설) (가로등주 교체)	동작구 도로과-9886 2019.7.4

□ 검토의견

○ 교통안전표지 설치 및 유지보수 대상 30건(규제 9건, 유지보수 21건)에 대하여  금회 제2차(추가1) 작업지시 하여 신속히 설치코자 하며,

○ 1차작업 미완료 5건에 대하여는 현장여건(신호기 및 노면 작업)이 조성되면 공사실시 토록 하고,(지시번호 : 1-8,9,10,25,27)

○ 규제사항 및 일상유지보수 등 긴급사항 발생시 추가 작업지시로 신속히 처리하여 이용시민의 불편해소 및 교통안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 행정사항

○ 제2차(추가1) 작업지시 : 2019. 7. 11.

○ 제2차(추가1) 작업기간 : 2019. 6. 11. ~ 8. 30일까지

※ 금회 작업기간 중 경찰청 규제사항 및 긴급사항 발생시 추가 작업지시로 신속히 조치코자 함.

붙 임 : 1. 제2차(추가1) 작업지시 사항 1부.

2. 위치도 및 관련도면(별첨) 1부.  끝.