문서번호	시설개선과-6454
결재일자	2019.7.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
임신택		윤정한	07/12 김정열
협 조
	운영기획과장			김남대
	주무관			이호경
	주무관			이경수

- 잠실주경기장 등 3개 시설물 -

정밀안전점검 용역 시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  7.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 잠실주경기장 등 3개 시설물 -

정밀안전점검 용역 시행 계획

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 따라 점검시기가 도래된 잠실주경기장 등 3개 시설물에 대한 정밀안전점검을 실시하여, 시민이 안전하게 사용하는 시설물이 되도록 유지관리에 만전을 기하고자 함

관련근거

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 및 같은법 시행령 제8조

- 안전점검의 실시 등

○ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 (국토교통부 고시 제2018-45호)

- 안전점검 방법 및 절차 등

○ 2019년 체육시설관리사업소 안전점검 추진계획 (시설개선과-10407호 2018.12.11.)

- 체육시설관리사업소 유지관리 시설물에 대한 연간 안전관리 종합 계획

정밀안전점검 등 세부 규정

○ 정밀안전점검 및 정밀안전진단 시기 및 기준

안전등급	정밀안전점검		정밀안전진단
	건축물	그 외 시설물
A 등급	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
BㆍC 등급	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
DㆍE 등급	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

○ 기타 정기안전점검 및 긴급점검

- 정기안전점검 : A·B·C등급 반기1회 실시

- 긴급점검(손상점검, 특별점검) : 관리주체 필요시 실시(정밀점검 수준)

정밀안전점검 대상 현황

○ 대상시설 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실제1수영장

연번	구 분	준공년도	구조	시설규모 (지하/지상)	최근 정밀안전점검 등 실시현황	비고 (등급)
1	잠실주경기장	1984	철골(지붕)· 철근콘크리트	연면적100,151㎡ (1/3)	`16.12 정밀안전진단 `19.06 정기안전점검	1종C
2	잠실야구장	1982	철골(지붕)· 철근콘크리트	연면적 45,312㎡ (1/3)	`16.08 정밀안전진단 `19.06 정기안전점검	1종B
3	잠실제1수영장	1980	철골(지붕)· 철근콘크리트	연면적 22,479㎡ (1/3)	`16.09 정밀안전점검 `19.06 정기안전점검	2종C

※실내체육관, 제2수영장, 목동운동장(3개시설), 효창운동장은 2020년 실시 예정

용역시행 계획

○ 용 역 명 : 잠실주경기장 등 3개 시설물 정밀안전점검 용역

○ 입찰방법 : 제한공개경쟁(지역제한)

○ 용역기간 : 2019. 7월 ~ 10월 [착수일로부터 90일(공휴일 포함)]

○ 예정용역비용 : ***********(부가세 포함)

○ 입찰참가자격

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제28조 규정에 의거 안전진단전문기관(종합 또는 건축분야)으로 등록 되었거나, 건설산업기본법 제9조 규정에 따라 시설물유지관리업으로 등록된 업체로서 입찰공고일 전일부터 서울특별시에 주된 영업소를 둔 자(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제9조 규정에 따른 책임기술자의 자격조건 및 교육 등을 이수한 자를 보유, 선임할 수 있어야 함)

○ 예산검토

- 소요예산 : ***********

- 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 노후체육시설 개보수 사업, 잠실종합운동장·구의야구공원 시설 개·보수 시설비

- 예산편성현황

**********************************************************************************************************************************************************

- *************************************

(단위 : 천원)

****************************************************************************************************************************************************

추진일정(안)

○ 2019. 7. 19 : 기술용역타당성 심사 및 과업내용서 등 용역 내용 사전규격 공개 완료

○ 2019. 7. 22 : 용역 발주

○ 2019. 7. 31 : 용역 계약 및 착수

○ 2019. 10. 30 : 용역준공 및 시설물종합정보시스템(FMS) 점검결과 입력

※현장조사 및 점검은 전국체전기간 전 완료(8~9월)하고, 체전기간(10월) 동안에는 보고서 작성 등의 업무를 수행하여 전국체전 행사 진행에 간섭없이 추진

붙 임  1. 정밀안전점검 과업내용서 1부.

2. 정밀안전점검 용역 설계서 1부.  끝.