문서번호	계약심사과-12524
결재일자	2019.7.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목심사2팀장	계약심사과장
설상운		노형근	07/12 김수정
협 조
	설비심사팀장			최주용
	건축심사팀장			서홍일

신월6동 복합청사 건립공사 설계VE·계약심사 통합심사 실행계획

2019. 7.

계약심사과

신월6동 복합청사 건립공사

설계VE·계약심사 통합심사 실행계획

양천구청(건축과)시행「신월6동 복합청사 건립공사」에 대해 설계VE전담팀을 구성하고, 설계VE·계약심사 통합심사를 추진하고자 함.

1		추진 근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ ‘19년 설계경제성 심사 운영계획(계약심사과-4339, ’19. 3. 7.)

□ 설계경제성 심사 신청(양천구청 건축과-11769. ‘19. 7. 9.)

2		심사 개요

□ 신청부서 : 양천구청(건축과)

□ 사 업  명 : 신월6동 복합청사 건립공사

□ 위    치 : 양천구 신월동 581-1외

□ 사업내용 : 공공청사, 사회복지시설 건립

- 규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 6,038.99㎡

□ 공 사 비 : 15,083백만원

□ 용역기간 : ’18. 11. ~ ’19. 9.

□ 설계공정률 : 90%

3		심사 계획

□ 주요 심사 내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

○ 설계예산서 도서간 일치 여부 및 공사원가 적정성 등

□ 추진 방법 : VE전담팀을 구성하여 설계VE·계약심사 통합심사

○ VE심사팀, 발주·설계·유지관리부서 직원 등 22명 내외 참여

구 분	구 성 원	역 할
총 괄	▸ 노형근 토목심사2팀장 계약심사과 ▸ 설상운 주무관 계약심사과	․ 설계VE 계획, 회의 지원 등
리 더	▸ 허재영 위원 한국가치기술연구소	․ 워크숍 준비, 진행 ․ 결과보고서 작성
진행보조요원	▸ 유대한 요원 한국가치기술연구소
외부 검토위원 (6개 분야)	▸ (건축계획) 정미숙 위원 무영종합건축사 ▸ (건축구조) 정행철 위원 대우조선해양건설 ▸ (건축시공) 김형기 위원 ㈜동일건축 ▸ (토 질) 박윤규 위원 동해기술공사 ▸ (전 기) 정영수 위원 (유)믿음이엔지 ▸ (기 계) 유재승 위원 동방엔지니어링	․ 기능 분석 ․ 기술 검토 ․ 아이디어 제안 ․ 아이디어 평가 ․ 제안서 작성
내부 검토위원 (5명)	▸ (건축) 배재식 주무관 계약심사과 ▸ (토목) 소영신 주무관 계약심사과 ▸ (조경) 김소영 주무관 계약심사과 ▸ (전기) 황문연 주무관 계약심사과 ▸ (기계) 김경일 주무관 계약심사과	․ 설계도서 형식 검토 ․ 계약심사
발주부서	▸ 손동화 주무관 양천구청 건축과	․ 사업설명, 제안서 검토
유지관리부서	▸ 권명진 주무관 양천구청 주민협치과	․ 유지관리 시 특이사항 설명
설계자(5명)	▸ 전창두 소장 누아건축사사무소 ▸ 분야별 설계자	․ 사업설명회 준비 ․ 제안서 원가분석 등

□ 설계VE․계약심사 통합심사 회의 세부일정

일 시	내 용
’19. 7. 23.(화) 10:00~17:00	- 사업설명 및 현장답사, 기능분석・정리 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실 및 현장
’19. 7. 25.(목) 10:00~17:00	- 검토회의 : 대안 구체화, 설계도서 형식검토 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’19. 8. 1.(목) 10:00~17:00	- 최종검토회의 : 제안 채택회의, 설계도서 보완 통보 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’19. 8. 16(금)	- 설계도서 수정본 제출 (양천구 건축과 ⇒ 계약심사과)
’19. 8. 28(수)	- 설계VE․공사원가 통합심사 결과 통보 (계약심사과 ⇒ 앙천구 건축과)

□ 설계VE·계약심사 통합심사 시행절차

구분		추진 일정		수행 절차		추진 내용
계획수립		’19. 7. 10.		설계경제성 심사 신청 (발주부서)		▸ 심사 신청서 접수
		’19. 7. 11.		설계VE․계약심사 통합심사 계획수립 (계약심사과)		▸ 추진일정, 시행방법 등 ▸ 설계VE팀 구성
설 계 VE ․ 계 약 심 사 통 합 심 사 운 영		’19. 7. 23. ~ ’19. 8. 1. (1일차~10일차)		설계VE 검토회의 【설명회,워크숍,이행회의】 (VE전담팀)		▸ 자료 사전검토 ▸ 사업설명 및 현장답사 ▸ 1,2차 워크숍 - 대안발굴, 제안서 작성 - 설계예산서 검토 - 설계제안 채택회의 ▸ 최종 검토회의 : 의사결정
		’19. 8. 2. (11일차)		VE 제안서 통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸ VE 제안서 통보
		’19. 8. 16. (25일차)		설계도서 수정 및 제출 (발주부서 → 계약심사과)		▸ 설계도서 수정 및 제출
		’19. 8. 19. ~ ’19. 8. 26. (35일차)		계약심사 (계약심사과)		▸ 분야별 계약심사 ▸ 설계VE 결과보고서 작성
		’19. 8. 28. (37일차)		통합심사 결과통보 (계약심사과 → 발주부서)		▸ 심사결과 통보

4		소요 예산

□ 총금액 : 10,651천원

○ 외부위원 수당 : 10,151천원

- VE리더(기술사+보고서작성)  : 2,472천원(2,472천원 × 1명)

- 검토위원(기술사)           : 6,840천원(1,140천원 × 6명)

- 진행보조요원(중급기술자)    :   839천원(839천원 ×1명)

※「설계VE 위원 수당 지급기준 개선 계획」(계약심사과-15310, ’18.9.20)에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 500천원

□ 지급부서

○ 위원  수당 : 신청부서(양천구청 건축과)

○ 회의운영비 : 계약심사과

5		향후 계획

□ 통합심사 결과 통보 --------------------  ’19. 8. 28.

붙   임 : 1. 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2. 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.