문서번호	방재시설부-10316
결재일자	2019.7.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
정영미		신용우	07/12 이임섭
협조

『구북부법조단지 환경개선공사』

조경식재 3차 실정사항 검토보고

2019. 7.

방재시설부

조경시설과

『구 북부법조단지 환경개선공사』

조경식재 3차 실정사항 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『구 북부법조단지 환경개선공사』조경분야 실정사항에 대하여 검토 및 조치계획을 보고드림.

Ⅰ		공 사 개 요

▢ 공 사 명 : 구 북부법조단지 환경개선공사

▢ 위    치 : 노원구 동일로174길 27(공릉동 622)

▢ 규    모 : 지상15층, 지하1층, 연면적 6,785.96㎡

❍ 조경개요

- 조경면적 : 2,015.51㎡

- 식  재 : 교목(소나무 등 16종 256주), 관목(남천 등 16종 14,124주)

초화류(감국 등 20종 13,310본)

- 시설물 : 나무광장 플랜터 등 22종

- 포  장 : 벽돌포장 등 14종

▢ 공사기간 : 2018.03.21. ～ 2019.07.15.

▢ 공 사 비 : 42억원(조경 13억원)

▢ 시 공 사 : ㈜지앤지종합건설/강남조경건설(주),(주)도원도시

▢ 감 리 사 : ㈜경호엔지니어링

Ⅱ		검 토 사 항

▢ 주관부서 요청사항 및 현장 변경여건 변경

❍ 북측 출입부 차량하중을 견딜 수 있는 포장재 반영(박물관과요구)

❍ 북측 출입구 및 동측 하역장 이동식 볼라드 설치(박물관과요구)

❍ 서측 계단하부(주차장 경계부) 경관향상을 위한 플랜터 설치(박물관과요구)

❍ 서측 썬큰신설에 따른 녹지조성 및 현장여건 변경에 따른 관목 및 초화식재 물량조정 등 필요

❍ 건물벽면 토사 및 빗물유입(화단빗물패임)방지 필요

❍ 부지 출입구, 지하 주차장 일부 등 설계누락 포장반영

Ⅲ		검토결과

▢ 주관부서 요청사항 및 현장 변경사항 반영

❍ 북측 출입부 차량하중을 견딜 수 있는 포장재 반영

- 벽돌포장A 120㎡ → 인조화강석블럭 120㎡

- 화강경계석(150×150×1000) 0m → 화강경계석(150×150×1000) 8m

- 콘크리트포장A-1(T120) 215.02㎡ → 콘크리트포장A-1(T120) 200㎡

❍ 북측 출입구 및 동측 하역장 이동식 볼라드 설치

- 이동식 볼라드(H800) 0개 → 이동식 볼라드(H800) 12개

❍ 서측 계단하부(주차장 경계부) 경관향상을 위한 플랜터 설치

- 플랜터B(2000×1000×800) 12개 → 15개

- 공작단풍(H1.5×R6) 17주 → 23주

- 황금측백(H0.8×W0.5) 24주 → 39주

❍ 서측 썬큰신설에 따른 녹지조성 및 현장여건 변경에 따른 관목 및 초화식재 물량조정 등 필요

- 콘크리트포장B(T120) 94.12㎡ →  0㎡

- 콘크리트포장C(T120, 잔디식재) 33.53㎡ →  0㎡

- 인조화강석블럭C(T80) 0㎡ →  120.0㎡

- 화강경계석(150×150×1000) 0m → 22m

- 식재기반A(T450, 인공지반) 215.935㎡ → 243.262㎡

- 식재기반C(T700) 430.466㎡ → 575.898㎡

- 식재기반D(T1500) 163.359㎡ → 144.109㎡

- 관목: 덩굴장미등 2종 1,560주 → 덩굴장미등 2종 1,712주

- 초화류: 관중 등 2종 7,550본 → 관중 등 2종 7,325본

- 잔디 280.22㎡ → 잔디 299.3㎡

❍ 건물벽면 토사 및 빗물유입(화단빗물패임)방지 장치 필요

- 화산석멀칭(T100) 48.14㎡ → 화산석멀칭(T100) 141.1㎡

- 스틸엣지A 329.31m → 394.31m

❍ 부지 출입구, 지하 주차장 일부 등 설계누락 포장반영

- 인조화강석블럭C(T80) 0㎡ →  120.0㎡

▢ 공사비 변경

❍ 시설물공사

공 종 명	당 초	변 경	증 감	비고
직접공사비	184,826,335	190,579,502	5,753,167
제경비	80,132,582	81,310,498	1,177,916
공급가액	264,958,917	271,890,000	6,931,083
부가가치세	26,495,891	27,189,000	169,109
도급공사비	291,454,808	299,079,000	7,624,192
관급자재비	80,899,110	87,355,510	6,456,400
총공사비	372,354,000	386,435,000	14,081,000

❍ 식재공사

공 종 명	당 초	변 경	증 감	비고
직접공사비	374,714,426	391,131,078	16,416,652
제경비	101,210,974	104,244,322	3,033,346
임목폐기물	2,874,600	2,874,600	0
공급가액	478,800,000	498,250,000	19,450,000
부가가치세	47,880,000	49,825,000	1,945,000
도급공사비	526,680,000	548,075,000	21,395,000

Ⅲ		보고자 의견

❍ 상기 검토사항에 대하여 승인처리하며 준공정산에 반영코자 함.

붙 임 : 감리 보고서 및 변경 도서 1부.  끝.