투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	시설보수과장
(경유)
제목	현장가설사무실 점용기간 연장요청에 대한 회신

1. 시설보수과-3895(2019.07.11.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 「중랑물재생센터 슬러지건조시설 설치공사」를 위해 센터내에 설치하여 사용중에 있는 현장가설사무실의 공공하수도부지 점용기간 연장 요청에 대하여 아래와 같이 그 점용기간의 연장을 허가합니다.

- 아   래 -

가. 현장 가설사무실 현황

- 위    치: 서울시 성동구 용답동 247-6

- 목    적: 중랑물재생센터 슬러지건조시설 설치를 위한 현장사무실용 가설건축물 적치

- 점 용 자: 풍림산업(주) 외 2

- 점용면적: 17,366㎡ 중 225㎡(컨테이너 11동)

나. 점용기간 연장

- 당초 : 2017.12.01. ~ 2019.07.15

- 연장 : 2017.12.01. ~ 2019.10.30

다. 연장사유: 공사기간 연장.

3. 점용기간의 만료시 적치 가설건축물을 철거하고 원상회복이 되도록 발주부서는 사후관리에 만전을 기해주시기 바라며,

4. 향후 부득이한 사유로 점용기간 연장이 필요할 경우 기간 만료 전 30일 전까지 우리 센터와 협의하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 공공하수도무상점용허가서 각1부.

2. 허가조건 각1부.  끝.

	관리과장
주무관	김도근		관리과장	07/12 김광석
협조자
시행	관리과-8216	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2515	/전송	02-2211-2529	/	kdgsjk@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)