＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(긴급누수복구공사 1차)

1. 우리 사업소에서 시행중인 “2019년 서초․강남구관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)"에 대하여 계약물량 증 ․ 감 사항 및 신규공종 변경사항이 발생함에 따라 아래와 같이 설계변경(1차)시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 서초․강남구 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자 : 성신진흥산업개발(주)  대표 김보민

다. 계약기간 : 2019. 4. 18. ~ 2020. 6. 30.

라. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	비 고
총계약금액	2,008,244,460	2,008,244,460	변동없음

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	비 고
총부기금액	2,008,244,460	2,008,244,460	변동없음
1차 부기금액	1,310,000,000	1,310,000,000	변동없음
2차 부기금액	698,244,460	698,244,460	변동없음

마. 차수별 부기금액 변경

바. 설계변경 사유 : 신규공종 및 공종별 계약물량 증,감 발생

- 신 규 공 종 : 고압블록포장걷기[면적10㎡미만, 누수(야간), 불용] 외 28종

- 계약물량 증가 : 되메우기(환토)인력, 누수야간, 불용 외 30종

감소 : 아스팔트포장절단(200mm)누수,불용 외 75종

- 사급자재 물량 변경 : 티(슬립인죠인트 D=40mm) 외 8종

사. 예산과목 - 상수도사업비,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비(누수복구)

상수도사업비,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비(불용관정비)

따로붙임 :  1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

주무관	강희창		시설관리과장	정재현		강남수도사업소장	07/12 조세연
협조자	주무관	경혜원		행정지원과장	이진우
시행	시설관리과-15679	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)459-4	/
전화	02-3146-4905	/전송	02-3146-4939	/	jin2ju@seoul.go.kr	/	부분공개(6)