투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	송풍기 성능개선 공사에 따른 정전계획

1. 시설보수과-1835(2019.7.11.)호와 관련입니다.

2. 하수처리효율 향상과 안정적인 방류수수질기준 준수를 위한 노후 송풍기 성능개선공사에 따른 정전계획이 있어 아래와 같이 제출합니다.

- 정전계획 -

일 시	정전시간	정전 대상시설	작업내용
2019.7.22.(월)	5시간 (09:00∼14:00)	제2송풍기동 수처리2처리장 TMS	변류기교체 및 고압 전력케이블 단말처리 등
2019.7.23.(화)	5시간 (09:00∼14:00)	제1송풍기동 수처리1처리장	송풍기 2대 교체 및 변류기교체 및 고압 전력케이블 단말처리 등
2019.7.30.(화)	5시간 (09:00∼14:00)	제2송풍기동 수처리2처리장 TMS	송풍기 3대 교체 및 변류기교체 및 고압 전력케이블 단말처리 등

붙임 : 관련공문 및 2019년 송풍기 성능개선 추진계획 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
수신자	한강유역환경청장(수질총량관리과장),한국환경공단이사장,서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
주무관	장인환		운영과장	代장인환		난지물재생센터소장	07/12 代윤석경
협조자
시행	운영과-1097	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)난지물재생센터 운영과	/
전화	02-300-8521	/전송	02-300-8544	/	jangih@seoul.go.kr	/	대시민공개