“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(서울로7017 정밀안전진단용역)

1. 교량안전과-10171호(2019.06.07.) 및 –12357호(2019.07.11.)와 관련입니다.

2. 우리 시에서 추진 중인『서울로7017 정밀안전진단용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울로7017 정밀안전진단용역

나. 용역기간 : 2018.03.27.~ 2019.03.21.

다. 도 급 사 : ㈜한국시설안전연구원외 1개사

라. 도 급 비 : 금196,918,000원

마. 준공기한 변경 내용

- 당초 : 2018.03.27.~ 2019.03.21. ⇒ 변경 : 2018.03.27.~ 2019.07.26.

바. 귀책사유 : 발주처 (지연배상금 미부과)

사. 연기사유

- 용역 일시중지후 용역재개(′19.7.3)함에 따라 용역중지기간을 반영하여 연장.

아. 예산과목

- 교량관리, 교량시설물 점검관리, 교량시설물 안전점검 및 진단, 시설비(2018년 명시이월)

붙임 1. 준공기한 연기 검토 보고 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
★주무관	정성민		강북일반교량팀장	손창익		교량안전과장	07/12 김종호
협조자	계약1팀장	조현
시행	교량안전과-12397	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1969	/전송	02-2133-1429	/	phj4ever@seoul.go.kr	/	대시민공개